문서번호	건축부-17648
결재일자	2023. 10. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	건축부장
이제관		윤용훈	10/27
			代왕승찬
협조

『서서울미술관건립공사』

시공상세도 작성비용 실정보고 검토 보고

2023.10

도시기반시설본부

(건 축 부)

『서서울미술관건립공사』

시공상세도 작성비용 실정보고 검토 보고

「서서울미술관건립공사」관련 건설사업관리단으로 부터 제출된 시공상세도 작성     관련 실정 보고에 대한 검토 결과를 보고 드림

******************

1		공 사 개 요

○ 공 사 명: 서서울미술관 건립공사

○ 위    치: 금천구 독산동 1151번지 (금나래 중앙공원 일원)

○ 규    모: 지하2층/지상1층, 연면적 7,186.99㎡

○ 공 사 비*********************************

******************************************************************

***************************************************

*******************************

2		실정보고 검토내용

○ 근 거

- 건설기술진흥법 제48조(설계도서의 작성 등) 제4항 제2호

- 건설기술진흥법시행규칙제42조(시공상세도 도면의 작성 등)

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제135조(시공상세도승인)

- 국토해양부 건설공사 시공상세도 작성지침

- 엔지니어링사업대가의 기준(산업통상자원부 고시 제2021-137호(2021.07.29.) 제21조~ 제24조

- 서서울미술관 공사시방서

- 시공상세도 작성비용 관련 실정보고 승인 요청〔광장(서서울)2023-510('23.9.7)호〕

○ 주요 변경 내용

***************************************************************

구분	당초	변경	변경사유	비고 (공사비)
*****	*	************************************** *****************	**************************************	********

※ 당초 예정수량보다 실제 작성된 수량에 증감이 있는 경우 발주청의 승인을 받은 수량에 따라 사후 정산함.

○ 단가 적용기준(공사계약 일반조건 제7절 계약금액의 조정)

**************************

3		건설사업관리단 검토의견

***********************************************************************

4		처 리 의 견

○ 책임건설사업관리기술자의 적정의견에 따라 실정보고 승인.

○ 추후 관련절차에 의거 설계변경 시, 금액 확정(설계변경 자문 절차 계약심사 등에 따라 변동 될 수 있음을 통지)

붙임  실정보고(시공상세도)승인요청 1부.  끝.