아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연장 계약 의뢰 (지하차도 진입차단 전광표지 및 방송장비 등 5건)

1.「기전과-12664(2023.10.24.)」(검토보고)와 관련된 내용입니다.

2. 우리 사업소에서 시행 중인 "지하차도 진입차단 전광표지 및 방송장비 등의 설치"사업의 소요 자재 납품 기간 부족으로 아래와 같이 연장 변경계약 의뢰 하니 검토후 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약현황

구 분		납품요구번호	계약기간	계약금액	계약업체	계약방법
전광판	3종 9대	****************	*******************	***********	******** ***********	** ****
방송장비	비상유닛 1개, 오디오앰프 10개, 리모트앰프 1개	****************	*******************	***********	******* ***********	** ****
	호온스피커 9개	****************	*******************	********	****** ***********	** ****
네트워크스위치	9대	****************	*******************	***********	******** ***********	** ****
CCTV	4대 및 부속장비	****************	*******************	***********	********* ***********	** ****

나. 변경기한 : 2023. 11. 30. 까지 (5건 모두)

다. 연장사유 : 병행 공정인 진입차단시설 설치공사 지연

라. 귀책소재 : 서울특별시 서부도로사업소

마. 지체상금 부과여부 : 미부과

바. 예산 과목 : 재난안전정책과, 재해 및 재난 예방, 재난예방 및 복구, 재난예방(재난관리기금 재난계정), 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 진입차단시설 준공기한 연장 검토 보고서 1부.

2. 물품계약서 5부.  끝.

	기 전 과 장
주무관	김성균		주무관	정영술		기전과장	10/26
최경주
협조자	주무관	이숙영
시행	기전과-12795	(	2023. 10. 26.	)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203, 서부도로사업소 기전과 (상암동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8394	/전송	02-300-8410	/	fttsky1212@seoul.go.kr	/	부분공개(5)