아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시의회
수신	법제담당관
(경유)
제목	연구용역 기간 연장 요청

1. 신한대학교 산학협력단 산학연구팀(산락협력단) 2023-847(2023.10.19.)호 관련입니다.

2. 2023년도 의회 입법정책 연구용역(면목선 도시철도 건설을 위한 정책적 타당성 확보를 위한 연구)에 대해 아래와 같이 과업기간 연장을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연구용역 개요

- 용 역 명 : 면목선 도시철도 건설을 위한 정책적 타당성 확보를 위한 연구

- 계약업체 : 신한대학교 산학협력단

- 계약금액 : 금35,000,000원(금삼천오백만원)

- 계약기간 : 2023.7.18~2023.11.16.

나. 변경사항(계약기간 연장)

- 연기기한 : (당초) 2023.11.16 → (변경) 2023.12.16.

- 귀책소재 : 해당없음(지체상금 미부과)

- 연기사유 : 주민 설문조사 내용 및 범위 수정 등으로 인한 설문조사 기간 확대

붙임 : 1)관련공문 1부.

2)합의각서 1부. 끝.

	교통수석전문위원
입법조사관	온순현		교통전문위원	박준영		교통수석전문위원	10/26
장훈
협조자
시행	교통전문위원실-3149	(	2023. 10. 26.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 세종대로 110	/	http://www.smc.seoul.kr
전화	2180-8236	/전송	02-2180-8249	/	osh8579@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)