문서번호	관리단속과-14003
결재일자	2023. 10. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		관리단속과장
정명준		10/26
		이우승
협조

2023년 별관 건물정밀안전진단 용역 준공기한 연장 보고

2023년 청사 별관 정밀안전진단 용역 준공기한 연장 보고

2023.  10.

북부도로사업소

[관리단속과]

2023년 별관 정밀안전진단 용역

발주기관의 필요에 의한 과업 결과보고서 추가 검토 요청에 따라 과업준공까지의 절대공기가 부족함으로 인하여 준공기한을 연장하고자 보고드림.

준공기한 연장 보고

□ 용역개요

❍ 용역명 : 2023년 별관 건물정밀안전진단 용역

	당초	변경
준공 기한	23.10.26.	23.11.09.

❍ 계약업체 : **********

❍ 계약기간 : ***********************

❍ 계약금액 : ***********************

□ 준공기한 연장

※ 계약금액 및 설계내역 변동없음.

❍ 준공기한 연장 사유 : *******************

- 별관 정밀안전진단 결과보고서에 대한 검토 및 수정 등을 추가요청함에 따라, 절대공기 부족에 따른 준공기한 연장이 필요함.

❍ 지체상금 부과여부 : ***

□ 담당자 의견

❍ 계약상대자측으로부터 준공기한 연장통보 및 이행가능 여부를 확인하고 준공기한 연장을 시행하고자 함.

붙임  1. 합의각서 1부.  끝.