문서번호	시설보수과-9296
결재일자	2023. 10. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		임형규	10/27
			이경우
협 조

『구로역지하차도 외1개소 보수공사』

준공연장 실정보고에 따른 검토결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 10.

강서도로사업소

(시설보수과)

『구로역지하차도 외 1개소 보수공사』

“준공연장 실정보고에 따른 검토결과 보고”

'23년 예산사업으로 추진 중인『구로역지하차도 외 1개소 보수공사』와 관련하여 감독위탁 기관으로부터 제출된 "준공기한 연장 실정보고" 검토결과 보고임

Ⅰ		공 사 현 황

□ 공 사 명 : 구로역지하차도 외1개소 보수공사

□ 공사기간 : 2023. 5. 1. ~ 10. 27.

□ 도 급 비 : 732백만원

□ 공사개요

- 구로역지하차도 표면보수 2,129㎡, 등촌지하차도 내요염도장 2,222㎡

□ 도 급 자 : (주)트러스트에이엔씨  대표 이 준 우

□ 공 정 율 : 88%

Ⅱ		보 고 내 용

□ 관련문서

○ 공사 준공기한 연기 검토보고서 제출

: 공사 준공기한 연기 검토보고

※ 서울시설공단 공사감독1처-5350(2023.10.25)

□ 준공기한 연기 사유

1. 발주처 추가 작업지시로 인한 절대공기 부족

▶ 관련근거

- 공사실정보고(제2차) 검토결과 통보(시설보수과-9001(2023.10.18))

- 추가 작업지시 요청(시설보수과-9192(2023.10.24))

▶ 준공기한 연기

- 당초 : 2023.05.01. ~ 2023.10.27.

- 변경 : 2023.05.01. ~ 2023.12.08.(42일 연기)

□ 검토내용

1. 발주처 추가 작업지시 내용 및 연장일수 산정

▶ 추가 작업지시로 인한 물량 증가

- 등촌지하차도 : 내오염도장 추가 시공(당초 1,433㎡ ⇒ 변경 2,046㎡)

- 구로역 및 등촌지하차도 : 중분대 빗금도색(당초 0㎡ ⇒ 변경 1,000㎡)

▶ 공사지연 사유 및 연장일수 산정 : 총 42일

- 작업일수 산정(내오염도장 15일+빗금도색 20일) : 35일

- 비작업일수 산정(기상+공휴일) : 7일

□ 보고자 의견

▶ 도급사에서 요청한 작업일수 산정 검토결과 미발주 내오염도장 및 중분대         빗금도색을 추가 작업지시로 인하여 공기 연장일수 42일 준공기한 연기         함이 타당함.

구분	당초	변경	비고
공사기간	2023.05.01. ~ 2023.10.27.	2023.05.01. ~ 2023.12.08.	42일 연장

※ 연기사유 귀책소재 : 발주처

※ 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅲ		향 후 계 획

-  상기 보고내용과 같이 감독기관(서울시설공단)으로부터 제출된 실정보고사항에 대하여 내용을 검토한 바, 적정한 것으로 판단되므로 본 공사에 반영하여 조치하고자 함.

-  공기연장건에 대해서 감독기관에 통보(“승인”)하고, 향후 설계변경 등 사업 추진에 만전을 기하고자 함.

▶ 2023. 10. 27. : 준공기한 연기

▶ 2023. 10. 28. : 추가작업등 추진

▶ 2023. 11. 20. : 설계변경

▶ 2023. 12. 08. : 공사 준공.

붙 임  관련공문(준공기간 연기 등)  1부.  끝.