문서번호	건축부-17691
결재일자	2023. 10. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		문화시설과장	건축부장
서인철		김선경	전결 10/30
			이형재
협조
	주무관		송종흔

「난지물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치사업」

실정보고(SSD 도어 등) 검토보고

2023. 10.

도시기반시설본부

(건   축   부)

「난지물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치사업」

실정보고(SSD 도어 등) 검토보고

「난지물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치사업」관련, 책임건설사업관리기술인으로부터 "총인처리시설동 창호 물량 변경" 실정보고가 제출되어 검토결과를 보고 드림

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 난지물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치사업

ㅇ 위    치 : 경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (난지물재생센터 내)

ㅇ 사업기간 : 2017.08.16. ~ 2024.05.10.

ㅇ 용    도 : 자원순환시설(하수처리시설)

ㅇ 총공사비 : 금15,009백만원

ㅇ 감리사/시공사: ㈜삼안 외 2 / 에이스건설㈜ 외 2

□ 실정보고 검토내용

ㅇ 관련근거

- 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제9장 계약일반조건. 제6절(공사 설계의 변경) 및 제7절(계약금액의 조정)

구 분		품명 및 규격		단위	당초	변경	증·감	비고
* * * * *	****	*********	************	*	****	****	*****	****
	****	*********	***	*	***	***	*****	****
	****	********	***	**	**	*	*****	****
		********	**	**	*	**	*****	****
		****	**********	*	**	**	*****	****
		****	***	*	*	**	*****	****
		****	****	*	**	*	*****	****
		**********	*****************	**	*	*	*****	****
		**********	***************	**	*	*	*****	****
		************************************	*************************************	**	*	*	*****	******
		*****	****************	**	*	*	*****	******
		*******	************	**	*	*	*****	******
		*****	**********	**	**	**	*****	****
	****	******************	*********************	**	*	*	*****	******
		****	************	*	*	*	*****
		*********	*********	*	*	*	*****
		******	*******	*	*	**	*****

- 실정보고(총인처리시설동 SSD도어 설치 및 SD도어 수량 정산 건) 승인요청 검토 보고[난지총인 제2023-678호, '23.10.11.]

ㅇ 주요 변경사항

- 출입문 창호 수량 산출 오류(설계도면과 내역서 불일치) 및 누락에 따른 물량 변경 및 정산 등

ㅇ 공사비 검토사항

- 공사비 증‧감현황

(단위: 천원)

구 분	당 초	변 경	증·감
*****	*****	******	*********
***	*****	*****	*********
****	*****	******	*********
***	***	*******	**********
*****	*****	******	*********

- 단가 적용

·물량증감: 기존 계약단가 적용

·신규비목: 협의율******** 적용

□ 건설사업관리단 검토의견

ㅇ 창호 SSD도어의 내역누락 및 FSD, SD도어의 수량 증감 타당함

ㅇ 신규비목의 적용단가는 협의율*********을 적용하고, 수량 증감 비목의 단가는 계약내역의 단가를 적용하여 산정한 공사비로 적정한 것으로 판단됨

□ 처리의견

ㅇ 건설사업관리단으로부터 제출된 창호 수량 변경에 대한 실정보고는 적정하다고 사료되어 우선 승인 처리하고,

ㅇ 향후 방재시설부에 통보하여 계약심사 절차를 거쳐 공사금액을 확정하고자 함

붙임:  건설사업관리단 실정보고서 1부.  끝.