문서번호	문화정책과-15375
결재일자	2023. 10. 30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	문화공간운영팀장	문화정책과장
이재익	김은경	10/30
		전재명
협 조

「돈의문 소공원 조성공사 관련 건설폐기물 처리 용역」

실정보고 검토보고

2023. 10.

문 화 본 부

(문화정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

「돈의문 소공원 조성공사 관련 건설폐기물 처리 용역」

실정보고 검토보고

「돈의문 박물관마을 소공원 조성공사」"건설폐기물 처리 용역"에 대하여 처리물량 감소에 대한 실정보고 및 처리계획을 보고 드림

□ 계약내용

ㅇ 용 역 명 : 돈의문 소공원 조성공사 관련 건설폐기물 처리용역

ㅇ 계 약 자 : 문화기업(주) 대표 원종순

ㅇ 계약금액 : **************************

ㅇ 계약기간 : 2022.12.16. ~ 2023.10.31.

- 계약일 : 2022.12.16. / 착수일 : 2023. 1.25.

ㅇ 계약물량                                            (단위 : 톤)

******				*********
**	***	************	************
*******	*******	******	*****	*******

□ 실정보고 내용

ㅇ 폐기물 처리물량 감소에 따른 변경 계약 요청

- 폐기물 수집·운반 및 처리량 변경 전·후 현황                 (단위 : 톤)

******					*********
**	**	***	************	************
**	*******	*******	******	*****	*******
**	*******	*******	******	******	*******
**	********	********	******	******	********

- 폐기물 수집·운반 및 처리 변경내역                     (단위 : 원, ton)

**		****	****		****		****
			****	****	****	****
**	***	******	*******	**********	*******	**********	***********
	*********	*******	******	*********	******	*********	**********
	*********	*******	*****	*******	******	*********	**********
*			*******	**********	*******	**********	**********
*****	****	******	*******	**********	******	*********	**********
	****	******	******	*******	******	*********	********
*			*******	**********	*******	**********	**********
***				*********		*********	**********
**				**********		**********	***********

※ 산정금액 일부 단수 정리

- 변경사유 : 옹벽 저판 존치 등의 사유로 폐기물 발생 물량 감소

□ 검토결과

ㅇ 공사가 준공단계로 추가적인 폐기물 발생 없음.

ㅇ 처리 물량 및 단가 적용이 적정함

- 폐기물 수집·운반 및 처리 물량은 올바로 시스템(allbaro.or.kr) 내용과 일치

- 변경 전·후 단가는 당초 계약단가를 적용하여 적정함

□ 처리계획

ㅇ 실정보고 내용이 적합하므로 계약금액 감액하여 재무과에 설계변경 계약을 의뢰코자 함.

첨부 1. 실정보고서 1부

2. 설계변경 내역서 1부

3. 합의각서 1부. 끝.