아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	용역 변경 계약 시행(청사 승강기 설치공사 소방감리용역)

우리 사업소에서 시행하는 아래 용역에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기에 따른 변경 계약을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명: 청사 승강기 설치공사 소방감리용역

2. 계 약 자: ************

3. 계약금액: ***********************

4. 예산과목: 공기구비품,유형자산취득,기계장치,시설비및부대비,감리비(서비스장비확충및환경개선)

5. 변경사항

-  계약기간 당초: 2023. 08. 02. ~ 2023. 10. 31.
변경: 2023. 08. 02. ~ 2023. 11. 17. (총 17일 연장)

6. 변경사유

-  청사 승강기 설치 공사 준공기한 변경에 따른 감리용역 기간 연장

붙임  1.「청사 승강기 설치공사 재해예방 기술지도용역」설계변경 검토 보고 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

주무관	장주환		주무관	윤민구		행정관리팀장	김덕기		행정지원과장	代김덕기
강동수도사업소장	10/30
代송정자
협조자
시행	행정지원과-17375	(	2023. 10. 30.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 2층 행정지원과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5013	/전송	02-3146-5078	/	hwan0223@seoul.go.kr	/	부분공개(6)