문서번호	토목부-20112
결재일자	2023. 10. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
이나영		박운용	10/31
			이임섭
협조
	주무관		노승환

대모지하차도 자립식옹벽 공법변경 검토보고

- 양재대로 구조개선사업 -

대모지하차도 옹벽 변경 검토보고

2023. 10.

도시기반시설본부

(토    목    부)

- 양재대로 구조개선사업 -

대모지하차도 옹벽 변경 검토보고

『양재대로 구조개선사업』대모지하차도 건설공사중 설계 반영된 옹벽 업체가 신기술·특허 사용협약을 포기함에 따라 절토부 옹벽을 설계변경하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		공 사 개 요

○ 위    치 : 강남구, 구룡터널 사거리 ~ 삼성의료원 교차로(개포4단지)

○ 규    모 : 폭 4차로, 대모지하차도 연장 1,174km

○ 기    간 : '18. 7. ~ '24. 12.

○ 사 업 비 : 1,940억 원

○ 시 공 사 : 롯데건설(주) 외1개사

○ 감 리 단 : (주)동명기술공단

Ⅱ		추 진 경 위

○ '18.08.    : 신기술·특허 사용협약서 체결

○ '23.08.21. : 견적서 접수(하도급율 157.4% 요구, 하도급 계약 체결 불가)

○ '23.10.05. : 신기술·특허 사용협약 이행 촉구 공문 발송

○ '23.10.19. : 신기술·특허 사용협약 포기 통보

- 자재비 급등으로 특허사용 협약대로 공사수행이 불가능하여 협약 포기

(관련문서 : 스페이스23-10-09-01)

Ⅲ		검 토 사 항

○ 공법변경 사유

- 대모지하차도 절토부 옹벽공사 설계 반영된 자립식 옹벽의 특허권자가 자재비 급등으로 신기술·특허 사용협약을 포기함에 따라 종점부 절토부 옹벽을 동등이상 성능을 확보한 공법으로 변경 필요

○ 옹벽 시공 변경구간

구 분		시점	종점	연장 (m)	옹벽높이		비고
					최소	최고
양 재 대 로	수서방향	STA.1+780	STA.1+930	150.0	1.25m	5.0m	개포4단지 앞 (종점부)

○ 절토부 옹벽 공법 비교

**	*********	****	*****	*****
**	*		*	*
**	********** ********** ************ ***********	************* ************ ******* ************* ****** ************ ****** *********** **********	************ ********** *********** ******* ********	********** ********* ********** ****** *********** **********
***	*********** ********** ************ ********	************* ****** ***********	************ ********** *****	*********** ********** ************* ***********
**** ***	**********	**********	**********	**********
**	**************** **************** ****************	****	****************	****************
***		*

Ⅳ		건설사업관리단 검토의견

○**********************************************************************************************************************************,

**********************************************************************************************.

ⅴ		조 치 계 획

○ 종점부 절토부 옹벽 공사의 변경이 필요한 실정으로 건설사업관리단의 옹벽공법 변경에 대하여 승인 조치하고, 추후 별도 실정보고후 설계변경 조치코자 함.

붙임 : 책임건설사업관리기술인 검토의견서 1부.  끝.