아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시미래한강본부
수신	2023년 한강(저수로, 취수장 주변) 준설공사 건설사업관리단
(경유)
제목	실정보고(주운수로 저수심 구간 준설) 승인 알림

1. 이준한강 2023-25호(2023.10.31)와 관련입니다.

2. 주운수로 저수심 구간 준설에 대한 실정보고 사항을 원안 승인하오니 공사 관리에 철거를 기하여 주시기 바라며, 공사 완료 후 수량 산출근거 및 공사 전, 중, 후 사진을 첨부하여 완료 보고서를 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 계획 준설량 변동시 반드시 사전보고 후 작업 시행하여 주시기 바라며, 추후 설계변경시 물량 증‧감 사항을 반영하여 정산 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 준설계획 변경(안)

구 분	당 초	변 경	증․ 감		비 고
합 계	6,800	6,800	변동없음
마포대교	-	1,272	증)	1,272
원효대교	-	1,096	증)	1,096
한강철교	-	2,977	증)	2,977
반포철탑	3,700	-	감)	3,700
잠실택시승강장	3,100	1,455	감)	1,645

끝.

	서울특별시미래한강본부장
주무관	박지수		치수과장	11/01
김창신
협조자
시행	치수과-3469	(	2023. 11. 1.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0696	/전송	02-3780-0744	/	cp8203@seoul.go.kr	/	부분공개(5)