문서번호	행정지원과-18811
결재일자	2023. 10. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		북부수도사업소장
김재훈	박은화	이재남		10/31
				권태규
협 조
	주무관		구명임

청사 승강기 실시설계용역 준공기한 연기보고

2023. 10. 31.(화)

북부수도사업소

[행정지원과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

청사 승강기 실시설계용역 준공기한 연기보고

우리 사업소에서 시행 중인 청사 승강기 실시설계용역에 대하여 자문회의 일정 조정 및 관련기관 협의 등에 따라 준공기한을 연기하고자 함

Ⅰ 용역현황

□ 용 역 명 : 북부수도사업소 청사 승강기 실시설계용역

□ 용 역 비 : **************************

□ 용역기간 : ***************************************

□ 계약업체 : ***********

Ⅱ 계약변경

□ 변경내용 : 계약기간 변경

계약금액	당 초	**************************
	변경후	**************************
	증․감액	증·감액 없음
계약기간	당 초	***************************
	변경후	***********************************

Ⅲ 연기사유

□ 연기일수 산정 : 용역과업 수행기간 40일 부족 산정

○ 본 용역의 준공기한은 ************까지로 과업지시하여 준공코자 하였으나, 2차 자문회의 일정을 내·외부위원 참석일정 조정, 관련기관 협의, 준공자료 작성 등으로 과업수행 절대공기가 부족한 실정임

○ 잔여공정

- 2차 자문회의 개최(11. 20. 예정)

- 자문회의 결과 통보 및 보완 지시

- 준공자료 작성 및 제출

Ⅳ 조치의견

□ 용역시행 중 상기와 같은 사항으로 절대공기가 부족하여 준공기한 연기 변경계약을 시행하고, ㈜도심환경건축사사무소에 통보하고자 함

□ 준공기한 연기

○ 당    초 : **************************

○ 변    경 : **************************

○ 지체상금 : 미부과

붙임  준공기한 연장 요청 공문 및 합의서 각 1부.