문서번호	치수과-3445
결재일자	2023. 11. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
박지수		김창신	11/01
			이유국
협 조

- 2023년 한강 저수로 준설공사 -

실정보고에 대한 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 10.

미래한강본부

(시설부)

- 2023년 한강 저수로 준설공사 -

실정보고에 대한 검토 보고

「2023년 한강 취수장 주변 준설공사」관련 건설사업관리자 실정보고 사항(주운수로 저수심 구간 수심측량 결과)에 대하여 검토하여 처리계획을 보고 드림

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2023년 한강 저수로 준설공사(장기계속)

ㅇ 위    치 : 한강 잠실수중보 ~ 신곡수중보

ㅇ 공사기간 : '23. 8. 21. ~ '24. 5. 31.

ㅇ 공사규모 : 준설 27,240㎥, 반출 47,670톤

- 지천합류부 : 홍제천, 반포천, 만초천

- 수상시설 : 한강갑문, 여의하류(서울마리나),반포철탑, 잠실택시승강장

ㅇ 계약금액 : 1,709,675천원(1차 1,000,000천원)

ㅇ 시 공 사 : 유호산업개발(주) 대표 유정환

ㅇ 감 리 사 : ㈜이준엔지니어링 외 1개사 대표 김정대

□ 추진경위

ㅇ '23.  8. 17. : 공사계약

ㅇ '23.  8. 21. : 공사착수

ㅇ '23.  9.  4. : 한강 저수심 구간 준설요청(수상여가과→치수과)

- 마포대교, 원효대교, 한강철교, 반포대교 주변, 잠실선착장

ㅇ '23. 9.18 ~ 10.10 : 수심측량 완료

ㅇ '23. 10. 18. : 검토의견서 제출(건설사업관리단→치수과)

□ 보고내용

ㅇ ㈜이크루즈 유람선 운항노선 준설 요청(수상여가과)

- 홍수기 하상변동으로 주운수로 일부 구간에 준설토 퇴적

- 이에 따른 여유 수심(3.5m) 부족으로 정기 운항중인 ㈜이크루즈 유람선 운항 곤란

‣ 수심측량 결과 : 마포, 원효, 한강철교 일부 구간 수심 부족(2.6m ~ 3.2m)

ㅇ 준설 요청구간에 수심 측량결과, 일부구간 수심부족으로 준설필요

- 마포, 원효, 한강철교 주변 최소수심 확보를 위한 준설 필요(준설량 5,344㎥)

※ 수심확보 구간 및 유람선 미운항 구간은 준설계획에서 제외(반포, 잠실선착장)

구 분	준설면적(㎡)	준설계획고	준설량(㎥)	비 고
합 계	454,665		5,345
마포대교	10,000	-3.50m	1,272	하상변동이 작은 본류 구간으로 여굴량 미반영
원효대교	40,500	-3.50m	1,096
한강철교	103,500	-3.50m	2,977
반포대교	13,500	-3.50m	-	확보수심 3.5m 이상
잠실선착장	287,165	-3.50m	-	미운항 구간

ㅇ 공사비 증·감 현황                                     (단위 : 원)

공 종	당 초	변 경	증․ 감		비 고
준설공	-	102,178,830	증)	102,178,830
사토운반공	-	116,214,420	증)	116,214,420
부대공		30,105,624	증)	30,105,624
제경비	-	89,501,126	증)	89,501,126
도 급 비	-	338,000,000	증)	338,000,000

□ 조치계획

ㅇ 안전한 유람선 운항을 위한 여유 수심 확보를 위해 건설사업관리단 검토의견을 반영하여 우선 작업지시

- 준설구간 : 마포, 원효, 한강철교 주변

- 준 설 량 : 5,345㎥

ㅇ 추가 준설공사 시행에 따른 소요예산은 사업계획 조정

- 공사의 시급성을 감안하여 반포철탑, 잠실택시승강장 준설량 조정

구 분	당 초	변 경	증․ 감		비 고
합 계	6,800	6,800	변동없음
마포대교	-	1,272	증)	1,272
원호대교	-	1,096	증)	1,096
한강철교	-	2,977	증)	2,977
반포철탑	3,700	-	감)	3,700
잠실택시승강장	3,100	1,455	감)	1,645

- 신규비목은 상호 협의한 협의율(92.99%)을 적용

□ 행정사항

ㅇ 실정보고 승인 통보(치수과→건설사업관리단)

ㅇ 물량 증‧감 사항을 반영하여 추후 설계변경 시행

붙임 : 1. 준설요청 공문 각 1부.

2. 건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.