문서번호	치수과-17339
결재일자	2023. 11. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		치수팀장		치수과장		안전건설교통국장
이은찬		오상호		민병기		11/01
						신용철
협조

공사 현안사항 검토보고[2023년 빗물받이 준설공사(단가계약)]

[2023년 빗물받이 준설공사(단가계약)]

공사 현안사항 검토보고

2023.11.

(안전건설교통국 치수과)

공사 현안사항 검토보고

가을철 집중호우 대비 낙엽 등으로 인한 빗물받이 막힘으로 도로침수 및 물고임 예방을 위해 재배정된 예산 및 집행잔액 활용계획을 보고 드림.

□ 관련근거

○ 하수관로 긴급준설비 예산재배정(市 물재생계획과-12508, `23. 8.25)

- 가을철 집중호우 대비 저지대 침수취약지역 하수관로 준설***********

○ 하수관로 긴급준설비 예산재배정(市 물재생계획과-15078, `23.10.16)

- 가을철 낙엽으로 인한 빗물받이 배수불량 및 하수악취 민원 해소***********

○ 가을철 집중호우 대비 낙엽으로 인한 빗물받이 막힘사고 예방대책 추진 계획

- 특별관리노선 지정과 순찰 및 청소강화 필요(치수과-16602, `23.10.19)

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 2023년 빗물받이 준설공사(단가계약)

○ 기    간 : 2023. 2.28. ~ 12.31.

○ 내    용 : *******************************

○ 도 급 비 : ************

○ 시 공 사 : 지금건설 주식회사 대표 이봉구

□ 추진경과

○ 2023. 2.28.     공사계약 및 착공

○ 2023. 6. 7.     설계변경(1회)

- 여름철 호우 대비 간선도로 및 저지대 취약지역 빗물받이 준설

○ 2023. 9.14.     설계변경(2회) … 공정율 83%

- 빗물받이 준설 공종(흡입·인력) 간 계약물량 조정

□ 추진계획(예산활용방안)

○ 긴급준설비 재배정예산 활용방안 … *********

- 가을철 집중호우로 낙엽으로 인한 빗물받이 막힘사고 예방을 위한 특별관리노선(15개) 준설 강화 및 저지대 침수취약지역 빗물받이 준설 시행

※ 긴급준설비 사용계획(******************************)

○ 공사 집행잔액 활용방안 … ********

- 특별관리노선 추가 준설 및 먹자골목 등 각종 이물질, 담배꽁초 등 빗물받이 배수불량 해소를 위한 민원처리 등 긴급준설에 활용

□ 조치계획

○ 작업지시(6~8차) 시행

-「2023년 빗물받이 준설공사(단가계약)」시공사에 우선 작업지시한 후, 추후 설계변경코자 함.

○ 공사비 변동내역

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증·감
총공사비	***********	*************	*************
도 급 비	***********	***********	*************
이 전 비	**********	**********	*

※ 예산 부족 시 이전비 내에서 추가 사용 후, 추후 실물량 정산 추진

□ 향후계획

○ 2023.11.    작업지시 시행

○ 2023.12.     설계변경(정산) 및 공사준공

붙임  1. 간선도로 및 저지대 등 침수취약지역 준설구간 1부.

2. 가을철 집중호우 대비 빗물받이 막힘사고 예방대책 1부.

3. 하수관로 긴급준설비 예산재배정 알림******** 1부.

4. 하수관로 긴급준설비 예산재배정 알림******** 1부.  끝.