문서번호	도시철도토목부-13157
결재일자	2023. 11. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
장대성		박형복	11/02
			윤병헌
협 조
	주무관			김봉성

「진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사」

횡갱 집수정 구조물 수량 변경 실정보고 검토

2023. 11

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사」

횡갱 집수정 구조물 수량 변경 실정보고 검토

건설사업관리단으로부터 제출된“횡갱 집수정 구조물 수량 변경 실정보고”건에 대한 검토보고임.

※ 관련서류 : 동명감 진접1 제2023-464호(’23.11.01)

□ 관련근거

ㅇ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

ㅇ 공사계약일반조건 제6절(공사 설계의 변경)의1. 가의 1)항

- 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있는 경우

□ 사업개요

ㅇ 공 사 명 : 진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사

ㅇ 공사금액 : 108,680백만원 (6차공사 17,000백만원)

ㅇ 공사기간 : ’18.12.31.∼ ’26.02.28. (6차공사 ’23.4.1.∼’23.12.31.)

ㅇ 규    모 : 인입선(L=5,556m), 차량기지 113m

ㅇ 도 급 자 : ㈜케이씨씨건설

□ 추진경위

ㅇ '23.09.05 : 원설계자 의견 요청

☞ 실시설계도면오류 등에 대한 검토 요청

ㅇ '23.09.19 : 원설계자 의견 송부

☞ 구조도 오류로 구조계산서와 도면 보완

☞ 집수정 바닥 마감, 월류판, 에폭시코팅 수량산출 오류 보완

□ 건설사업관리단 보고내용

ㅇ 실정보고 사유

- 횡갱 집수정 일반도(단면도)와 구조도간 규격이 상이하고, 일부 항목 수량산출이 도면과 실시설계보고서 내용이 상이하여 변경 필요

ㅇ 수량변경 현황

구 분	당 초		변 경		증 · 감
집수정 구조물	바닥콘크리트 철근가공조립 합판거푸집조립 에폭시코팅 철근(D13,D16) 레미콘(25-18-150)	125m3 20ton 539m2 565m2 21ton 128m3	바닥콘크리트 철근가공조립 합판거푸집조립 에폭시코팅 철근(D13,D16) 레미콘(25-18-150)	156m3 25ton 526m2 788m2 26ton 159m3	증) 증) 감) 증) 증) 증)	31m3 5ton 13m2 223m2 5ton 31m3

ㅇ 단가 적용 현황

- 기존내역 물량 증감에 대해 기계약단가 적용

ㅇ 공사비 증 · 감 현황

(단위:천원)

구 분	공 종	공 사 비			비고
		당 초	변 경	증 감
터 널	횡갱 집수정 구조물 수량 변경	******	******	********
▸직접공사비 계		******	******	********
▸제 경 비		******	******	********
▸물가변동비(K1~K6)		******	******	********
▸공 급 가 액		*******	*******	********
▸부 가 가 치 세(영세율)
▸도 급 액 계		*******	*******	********
▸관 급 자 재 비		*****	*****	********
▸총 공 사 비		*******	*******	********

ㅇ 건설사업관리단 검토의견

- 금회 횡갱 집수정 구조물 수량 변경 건에 대하여 공사계약 일반조건 제7절 1항에 의거 변경되는 공사비************는 추후 설계에 정산 반영함이 적정한 것으로 판단됨.

□ 원설계자 검토의견

ㅇ 집수정의 깊이는 수직구 및 횡갱 접속부와 같이 횡갱슬래브 바닥면 에서 집수정 슬래브 바닥까지 깊이 5.05m로 계획

ㅇ 집수정 바닥 마감, 월류판, 에폭시코팅은 수량산출 오류로 확인되며, 집수정 설치 깊이 오류를 반영하여 구조도를 재작성 하여 첨부함.

ㅇ 집수정 깊이 차이를 반영하여 구조검토를 재수행 하였으며 검토결과 철근량은 당초 철근량과 동일하게 검토됨.

□ 조치의견

ㅇ 건설사업관리단의 “횡갱 집수정 구조물 수량 변경 실정보고” 건에 대해 검토한 결과 적정한 것으로 판단되므로 승인 통보

ㅇ 향후 설계변경 시 정산·반영하여 사업추진에 만전을 기하고져 함.

붙 임 : 건설사업관리단 공문 1부.  끝.