문서번호	시설개선과-9415
결재일자	2023. 11. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
유정하		이균형	11/02
			오종범
협조

2023년 잠실운동장 전기설비 유지보수공사

설계변경 검토보고

2023. 11. 2.

체육시설관리사업소

(시 설 개 선 과)

2023년 잠실운동장 전기설비 유지보수공사

설계변경 검토보고

우리 사업소애서 시행중인「2023년 잠실운동장 전기설비 유지보수공사」의 계약금액 소진과 향후 시설물 유지보수를 위하여 설계변경을 검토하고 보고 드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2023년 잠실운동장 전기설비 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간: '23. 2. 6. ~ 12. 31.

○ 공사내용: 잠실운동장, 효창운동장 구의야구공원 노후 전기설비 정비

○ 계약업체: 주식회사 엠아이솔텍********

○ 계약금액: 금218,300,900원

□ 추진현황

○ 작업지시 금액************************

*********************)

계	1차	2차	3차	4차
*******	******	******	******	******

○ 향후 소요예산**********

***********************************************

*****************************************************************

************************

□ 설계변경 검토

○ 변경 필요성

- 전기설비의 안전관리를 위해 지속적으로 정비공사를 시행하여 왔으나, 정비 대상 노후 시설물이 많아 지속적인 정비가 필요

- 1 ~ 4차 작업지시 배관·배선공사 등 공종 간 시공물량 변경 및 정산

○ 계약금액 변경

(단위: 천원)

구 분	당 초	변 경	증, 감
****	***********	***********	*************

**********************************

********************************************************************************

□ 검토의견

○ 전기설비의 안전한 관리와 이용 시민의 편익 증진을 위하여 상기와 같이 설계변경을 시행, 전기시설물 유지관리에 철저를 기하고자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서 1부

2. 제비율검증확인서 1부.  끝.