문서번호	행정지원과-17665
결재일자	2023. 11. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장	강동수도사업소장
장주환	김덕기	최광운	11/02
			유재명
협 조

「강동수도사업소 청사 승강기 설치 공사」

설계변경 및 준공기한 연기 검토 보고(2차)

2023. 11.

강동수도사업소

행정지원과

「강동수도사업소 청사 승강기 설치 공사」

설계변경 및 준공기한 연기 검토 보고(2차)

우리 사업소에서 진행중인「강동수도사업소 청사 승강기 설치 공사」와 관련하여 설계 변경 및 준공기한 연기에 대해 검토 후 보고하고자 함

Ⅰ		사 업 현 황

□ 공사현황

ㅇ 공 사 명 : 강동수도사업소 청사 승강기 설치 공사(건축,기계) 등 3건

ㅇ 공사개요 : 장애인용 승강기 1대(15인승,MRL식) 설치

ㅇ 변경필요 계약현황

(단위 : 원)

계약 건명	업체	계약금액	계약기간	비고
『강동수도사업소 청사 승강기 설치 공사(건축,기계)』	*********	***********	************ ***********
『청사 승강기 설치공사 건축감리용역』	**********	*********	************ ***********
『청사 승강기 설치공사 재해예방 기술지도용역』	**********	*********	************ ***********

Ⅱ		검 토 사 항

□ 준공기한 연기 검토

ㅇ 공정현황

- 공정률 : 90%(2023. 11. 02. 현재)

- 잔여공정 : 외부 유리 및 판넬 설치, 복도 바닥 타일 부착 등 마감공사

ㅇ 연기기간

- 공사 준공기한(『강동수도사업소 청사 승강기 설치 공사(건축,기계)』)

: 2023.11.03. → 2023.11.30. (+27일 연장)

- 용역 준공기한(『청사 승강기 설치공사 건축감리용역』외 1건)

: 건축감리용역 - 2023.11.17. → 2023.12.14. (+27일 연장)

재해예방 기술지도용역 - 2023.11.03. → 2023.11.30. (+27일 연장)

ㅇ 준공기한 연기 사유

- 철골 하부 피트 제작 지연

- 설계변경 및 추가공사 관련 내부의견 수렴(소장실 구조 변경 등)

- 창호 제작 관련 실측 및 제작 지연

- 승강기 외부 유리 및 판넬 자재 수급 지연

ㅇ 계약업체 귀책 사유 : 없음

□ 설계변경 사항

ㅇ『청사 승강기 설치공사 재해예방 기술지도용역』

- 승강기 설치공사 준공기한 변경에 따른 금액 변동

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
준공기한	2023.11.03.	2023.11.30.
계약금액 (과업횟수)	1,065,600원 (6회)	1,420,800원 (8회)

Ⅲ		행 정 사 항

□ 각 계약 건별 준공기한 및 공사금액 변경 시행.  끝.