문서번호	시설관리과-25596
결재일자	2023. 11. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
임상근	代이승환	11/03
		이동욱

「2023년 효자동 외 9개동 장기사용 배급수관 정비공사」

현장 실정보고(3차) 검토

2023. 11. 3. (금)

중부수도사업소

(시설관리과)

「2023년 효자동 외 9개동 장기사용 배급수관 정비공사」

현장 실정보고(3차) 검토

시설관리과장 : 이동욱☎3146-2190 시설운영팀장 : 이유찬☎2191 담당 : 임상근☎2198

「23년 효자동 외 9개동 장기사용 배급수관 정비공사」와 관련하여 감독청인 서울시설공단에서 제출한 공사현장 실정보고(사토장 및 중간집하장 변경)에 대한 검토 사항을 보고드림

□ 관련근거

ㅇ 서울시설공단 공사감독2처-13936(2023. 11. 2.)

□ 공사현황

ㅇ 공 사 명: 2023년 효자동 외 9개동 장기사용 배급수관 정비공사

ㅇ 공사기간: 2023. 4. 24. ~ 2023. 12. 25.

ㅇ 공사위치: 효자동 외 9개동

ㅇ 공사개요: 배급수관 부설 D= 80~300mm, L= 1,000m

ㅇ 도 급 액: 490,214,080원

ㅇ 계 약 자: (주)화랑건설  대표 박순임

ㅇ 감 독 처: 서울시설공단 공사감독2처 강진혁

□ 감독처 실정보고

① 중간집하장 변경

ㅇ 현황 및 문제점

- 당초 중간집하장은 공사현장 3㎞ 이내로 설계하였으나, 서울시 내 적합한 중간집하장 부지 확보가 불가하여 변경이 불가피함.

******************************************

*************************

ㅇ 변경검토

- 도급사가 제출한 중간집하장***********으로 선정

- 자재(직관 및 이형관 등), 토사 및 폐기물 적치에 필요한 부지면적을 확보, 진출입로 상태 양호 등 중간집하장 적정 판단.

- 위치도 및 현장확인 사진

위치도(중간집하장)	현장사진

- 중간집하장 운반거리 및 단가산출 검토

1) 현장 내 최단 위치에서 변경 중간집하장까지 최적 운반거리(17km) 중 서울시 경계까지의 거리(12km)를 적용, 실제 시공물량을 설계변경(정산) 시 반영함이 타당.

2) 단가 산출 시 운반거리, 운반속도 등의 적용은 관련 기준에 따라 적정 산출, 변경된 중간집하장까지의 신규공종 단가 산출은 적정 판단.

****************************************

*******************************

② 사토장 변경

ㅇ 현황 및 문제점

- 당초 현장에서 발생한 잔토 처리는 수도권매집지로 설계되어 있으나, 수도권매립지의 토사반입 불가로 인해 잔토처리가 가능한 사토장으로 변경이 필요한 실정임.

***********************************************

ㅇ 변경검토

- 도급사가 제출한 사토장(경기도 포천시 신읍동 452)로 선정.

- 신규 사토장으로 사용 가능한 부지 면적을 확보하고 있으며 개발행위 허가증, 진출입로, 반입 동의서 등 검토한바 사토장 선정 적정 판단.

- 사토장 현장사진

위치도(사토장)	현장사진

- 사토장 운반거리 및 단가 산출 검토

1) 단가 산출 시 운반거리, 운반속도 등의 적용 사항은 관련 기준에 따라 적정하게 산출되어 적용됨.

****************************************************

******************************

□ 사업소 검토의견

ㅇ 중간집하장 변경

- 공사현장 3㎞내 부지 확보가 불가하여 도급사에서 제출한 집하장으로 변경 승인

- 실정보고(공사감독2처-8593호) 잔토소운반 등 누락 공종 반영 승인

ㅇ 사토장 변경

- 현장에서 발생한 토사의 상태 불량으로 수도권매립지 반입 불가에 따른 사토장 변경 승인

□ 조치 계획

ㅇ 서울시설공단으로 승인 통보하여, 설계변경 시 반영토록 함.

붙임  현장실정보고 관련 서류 각 1부.  끝.