아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서도로사업소
수신	기전과장
(경유)
제목	계약 변경 체결 통보(가양대교 경관조명 개선공사)

1. 기전과-11309(2023.10.30.)호와 관련입니다.

2. 아래와 같이 계약 변경 체결하고 통보하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 계약건명: 가양대교 경관조명 개선공사

나. 계약금액:**************

다. 계약상대자:**************

라. 계약일자: 2022. 12. 07.

마. 준공기한: 2023. 12. 15.

바. 계약변경내용

구분	당초	변 경	변경사유
준공기한	2023. 10. 30.	2023. 12. 15.	관급자재 납품 지연

사. 변경계약 체결일: 2023. 10. 30.

붙임: 공사변경계약서 1부.  끝.

	관 리 단 속 과 장
주무관	정동현		관리단속과장	11/02
최재성
협조자
시행	관리단속과-12532	(	2023. 11. 2.	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 강서구 양천로, 237	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7913	/전송	02-265-7958	/	finejdh@seoul.go.kr	/	부분공개(7)