문서번호	건축부-18044
결재일자	2023. 11. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	의료시설과장	건축부장		시설국장
김소연	왕승찬	이형재		11/03
				안대희
협 조
	시설팀장		정상진
	주무관		이은국
	주무관		이지원
	주무관		임형진

『은평병원 현대화사업(리모델링) 설계』

(3차수) 용역기간 연장 등 변경계약 검토보고

2023. 11. 03.

도시기반시설본부

(건 축 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

『은평병원 현대화사업(리모델링) 설계』 (3차수) 용역기간 연장 등 변경계약 검토보고
’23. 11. 3.(금)	건축부장: 이형재 ☎6438-2208 의료시설과장 : 왕승찬☎2220 담당 : 김소연☎2223

「은평병원 현대화사업(리모델링)」의 건설기술 심의조건(정밀점검 및 내진성능평가)을 반영하고자 사업의뢰부서와 협의 후 설계용역기간 연장 및 추가 용역을 실시하고자함

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 은평병원 현대화사업(리모델링) 설계용역

ㅇ 위    치 : 서울특별시 은평구 백련산로90

ㅇ 사업규모 : 총 9,016㎡(증축42㎡ + 리모델링8,974㎡)

**************************************

**************************************

*****************************************************************

*****************************

*************************************************

ㅇ 계 약 자 : ㈜해마종합건축사사무소 외 5

ㅇ 추진경위

- '22. 6.   설계공모 당선작 선정

- '22. 9.   설계용역 착수

- '23. 3.   1차 변경계약

- '23. 7.   설계경제성(VE) 심의 완료

- '23. 8.   2차변경계약, 방수공사 자문위원회

- '23. 9.   공용건축물 협의완료

- '23. 10.  건설기술심의(설계심의)심의완료(조건: 정밀점검, 내진성능평가)

□ 추가 과업 및 설계용역 연장검토

ㅇ 법령근거

-  「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제9장 계약일반조건 제8절

2. 계약기간의 연장

ㅇ 연장사유

- 건설기술심의결과 반영을 위한 과업 추가필요

- 사업의뢰부서 및 설계자 검토회의 실시(붙임)

ㅇ 추가 과업내용: 정밀점검 및 내진성능평가

ㅇ 용역 연장기간: 105일

(당초) '23.5.3. ~ '23.11.10. (변경) '23.5.3. ~ '24.2.23.

ㅇ 용역비 증가액: 약4,500 ~ 5,000만원(견적서 확인후 최저가 적용예정)

□ 검토의견 및 조치사항

ㅇ 건설기술심의(설계심의) 결과반영을 위해 설계용역 과업추가와 용역기간의 연장이 타당하며

ㅇ 설계자와 변경계약을 위한 행정절차를 이행하고자 함

붙임: 검토회의 결과 보고 1부.  끝.