문서번호	설비부-17436
결재일자	2023. 11. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
이정훈		배수웅	11/06
			신용휴
협조

『시립발달장애인복지관 별관 건립 전기공사』

관급자재 납품기한 연기 검토보고

2023. 11.

도시기반시설본부

(설비부)

『시립발달장애인복지관 별관 건립 전기공사』

관급자재 납품기한 연기 검토보고

『시립발달장애인복지관 별관 건립 전기공사』와 관련하여 건설사업관리단으로부터 제출된 관급자재 납품기한 연기 요청을 검토 후 아래와 같이 보고 드림.

공사현황

❍ 사 업 명: 시립발달장애인복지관 별관 건립 전기공사

❍ 위    치: 동작구 여의대방로20나길 39(보라매공원 내)

❍ 사업규모: 지하1층/지상4층, 증축면적 1,252.82㎡

❍ 사업기간: 2023.02.16. ~ 2024.02.15.

❍ 감 리 단: ************

관련근거

❍ 관급자재 납품기한 연기요청(혜원서시장 제2023-320호)

❍ 물품 다수공급자계약 특수조건 제28조(납품기한의 변경)

검토내용

❍ 납품기한 연기 사유

********************************************

❍ 납품기한 연기내용

******* ********	***	******* ***	*******
			***	***
*************** ******************	***	**********	***********	***********

감리단 검토의견

❍ 검토의견

- 전기공사 준공기한 연장에 따른 관급자재 납품기한을 변경하는 것이 타당하다 사료됨

보고자 검토의견

❍ 검토결과 조치의견

- 건설사업관리기술단이 제출한 관급자재 납품기한 연기에 대한 검토내용이 적정한 것으로 판단되어, 납품기한 연기 조치하여 공사추진에 만전을 기하고자 함

붙임: 감리단 요청 공문 1부.  끝.