문서번호	도시계획과-14626
결재일자	2023. 11. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		보행일상권조성팀장	도시계획과장
한인지		유수환	11/06
			정성국
협조
	주무관		김가영

’23년도 3분기 62개소 지역생활권계획 실행방안

중점관리사업 추진실적 점검 결과 보고

2023.  10.

도 시 계 획 과

(보행일상권조성팀)

’23년도 3분기 62개소 지역생활권계획 실행방안

중점관리사업 추진실적 점검 결과 보고

기수립된 62개소 지역생활권계획 실행방안 內 중점관리사업의 ’23년도 3분기 추진실적을 점검하고 그 결과를 보고 드림

□ 점검 개요

ㅇ 점검근거

- ｢생활권계획 실행방안 수립 및 운영기준(안) 보고｣(행정2부시장방침, ’19. 12. 10.)

- ｢’23년도 지역생활권계획 실행방안 중점관리사업 추진실적 점검계획｣(도시계획과-2231, ’23. 2. 20.)

ㅇ 점검방법: (區) 사업별 관리카드 작성·제출 / (市) 추진실적 점검·검토

ㅇ 점검기간: ’23. 9. 26. ~ 10. 19.

ㅇ 점검대상: 176개 중점관리사업(지역생활권 62개소)

구 분	대상 지역생활권	중점관리사업		[단계별 실행방안 수립대상지]
시범단계 (’18.~’19.)	5개소	28개
2단계 (’19.~’20.)	15개소	34개
3단계 (’20.~’22.)	20개소	54개
4단계 (’21.~’23.1.)	22개소	60개
총 계	62개소	176개

※ 중점관리사업에서 제외된 사업은 점검 미시행(’23년도 3분기 제외사업: 1개)

□ 추진 경위

ㅇ 단계별 지역생활권계획 실행방안 수립 및 중점관리사업 발굴 완료 이후, 분기별로 중점관리사업 추진실적 점검 시행

구 분	시범단계	2단계	3단계	4단계
수립완료시점	'19. 5. / '19. 10.	'20. 11.	'22. 7.	'23. 1.
점검시행시기	’20. 6. 이후	’21. 4. 이후	’22. 11. 이후	’23. 2. 이후

□ 점검 결과

ㅇ 지역별 중점관리사업 총괄 점검결과표

(단위: 개)

권역	자치구	지역생활권(단계)	중점관리사업 추진현황					비고 (중점관리사업 제외사업)
			합계	추진완료	정상추진	공정지연	계획변경
총계	24	62	176	24	126	20	6	1
도심권(4)	소계		5	-	2	2	1	-
	용산구	후암·용산(2)	1	-	-	1	-	-
	종로구	창신·숭인(3)	2	-	1	1	-	-
	중구	신당·황학(3)	1	-	-	-	1	-
	중구	필동·장충(4)	1	-	1	-	-	-
동남권(7)	소계		22	2	18	2	-	-
	강동구	천호·성내(2)	2	-	2	-	-	-
	강동구	길동·둔촌(3)	2	-	2	-	-	-
	송파구	석촌(3)	2	-	1	1	-	-
	송파구	송파(3)	2	1	-	1	-	-
	강남구	역삼·논현(4)	4	1	3	-	-	-
	강남구	삼성(4)	5	-	5	-	-	-
	강남구	대치·도곡(4)	5	-	5	-	-	-
동북권(22)	소계		70	13	53	4	-	-
	중랑구	면목(시범)	6	1	5	-	-	-
	중랑구	중화·묵동(3)	2	-	2	-	-	-
	중랑구	신내·망우(3)	4	-	3	1	-	-
	성동구	금호·옥수(2)	3	1	2	-	-	-
	성동구	왕십리·행당(3)	5	-	4	1	-	-
	성동구	마장·용답(4)	2	-	2	-	-	-
	광진구	자양(2)	2	1	1	-	-	-
	광진구	중곡(3)	1	-	1	-	-	-
	동대문구	청량리(2)	3	1	2	-	-	-
	동대문구	이문·휘경·회기(3)	2	-	2	-	-	-
	동대문구	전농·답십리(4)	2	-	2	-	-	-
	동대문구	장안(4)	1	-	1	-	-	-
	강북구	미아(시범)	11	4	5	2	-	-
	강북구	수유(3)	3	1	2	-	-	-
	도봉구	방학(2)	3	3	-	-	-	-
	도봉구	쌍문(3)	4	1	3	-	-	-
	도봉구	도봉(4)	3	-	3	-	-	-
	노원구	월계(2)	4	-	4	-	-	-
	노원구	공릉(3)	5	-	5	-	-	-
	성북구	정릉(2)	1	-	1	-	-	-
	성북구	장위·석관(3)	1	-	1	-	-	-
	성북구	성북·동선(4)	2	-	2	-	-	-
서남권(20)	소계		54	7	36	7	4	1
	구로구	오류·수궁(시범)	4	1	3	-	-	-
	양천구	목동2(2)	2	1	1	-	-	-
	양천구	신월2(3)	4	1	3	-	-	-
	양천구	신월1(4)	2	-	2	-	-	-
	강서구	화곡1(2)	1	-	-	-	1	-
	강서구	화곡2(3)	4	1	2	1	-	사업취소(1)
	강서구	발산(4)	3	-	2	-	1	-
	영등포구	대림(2)	2	-	2	-	-	-
	영등포구	신길(3)	3	-	2	-	1	-
	영등포구	당산(4)	1	-	1	-	-	-
	동작구	노량진(2)	4	1	3	-	-	-
	동작구	사당(3)	4	1	1	1	1	-
	동작구	상도(4)	3	-	3	-	-	-
	관악구	낙성대(2)	2	1	1	-	-	-
	관악구	신림(3)	1	-	1	-	-	-
	관악구	대학(4)	1	-	1	-	-	-
	관악구	난곡(4)	1	-	1	-	-	-
	금천구	독산(시범)	4	-	3	1	-	-
	금천구	시흥(3)	4	-	1	3	-	-
	금천구	가산(4)	4	-	3	1	-	-
서북권(9)	소계		25	2	17	5	1	-
	은평구	응암(시범)	3	-	2	1	-	-
	은평구	불광(4)	5	-	5	-	-	-
	은평구	연신내(4)	5	-	5	-	-	-
	서대문구	홍제(2)	2	1	1	-	-	-
	서대문구	신촌(3)	3	-	2	1	-	-
	서대문구	가좌(4)	3	-	0	3	-	-
	마포구	합정·서교(2)	2	1	1	-	-	-
	마포구	아현(3)	1	-	1	-	-	-
	마포구	성산(4)	1	-	-	-	1	-

※ 사업별 상세 추진실적은 중점관리사업 세부추진현황(붙임 1), 관리카드(붙임 2) 참고

ㅇ 중점관리사업 추진사항 점검 결과

① 추진완료 및 정상추진 사업: 추진완료 24개, 정상추진 126개

*************

권역	지역	사 업 명	특이사항	구분
도심	신당· 황학 (중구)	신당사거리 복합스포츠센터 건립	*******************************	***
서북	성산 (마포구)	홍제천 망원나들목 설치사업	***************************	***
서남	화곡1 (깅서구)	까치산역 지구중심 지구단위계획 재정비(까치산 지구중심)	****************************** ***************************** *************	***
	발산 (강서구)	화곡역지구중심 지구단위계획 재정비	*****************************	***
	신길 (영등포구)	신길5구역 부지 활용 (가칭)학교복합시설 건립	******************************************* ********************** ********************************** ***************************	***
	사당 (동작구)	범진여객부지 역세권 활성화 사업 (前 사당동 공공복합시설 건립)	************************************* *******************************	***

**************

권역	지역	사 업 명	문제점 및 특이사항	개선방안	구분
도심	후암· 용산 (용산구)	소월로 보행특화거리 조성사업	************************************************ *************	******************** ****************	***
	창신· 숭인 (종로구)	신설동역 11‧12번 출구 주변 보행환경개선사업 (신설동역 주변 보행환경개선 및 공원 조성사업 중 일부)	********************* *************	**************** ***************** **************** ************* ************	***
동북	미아 (강북구)	화계역 지구단위계획 수립 (前 화계사입구사거리 지구단위계획 수립)	****************** ********************	*****************	****
		삼양동 공영주차장 건립	******************** ******************** ************************* ******************** *********	*************** *************** ********	****
	왕십리· 행당 (성동구)	응봉유수지 저류조 설치와 병행하여 유수면 복개 및 주민 편익시설 조성	**************************** ******************** ************	****************** ************** ****************	***
	신내· 망우 (중랑구)	면목선111역(예정)일대 지구단위계획 구역 신규 지정 및 계획 수립	************************** ****************** ******************** ********************	*************** ************** *****	***
서북	응암 (은평구)	혁신파크 내 어린이 복합문화시설 건립	******************* **************** ************	*****************	****
	신촌 (서대문구)	연희역세권 지구단위계획 수립	****************** **************** ******************************************* ******************** ******************** *********	**************** ************* ************	***
	가좌 (서대문구)	남가좌동 공영주차장 입체화사업	********************** ****************** **************	**************** *************** **	***
		좌원상가 도시재생사업(가재울9구역)	********************** ******************* ************	******************* *************** ****************	***
		명지대 일대 지구단위계획 수립	***************** **************** **************** *************** ****************** **********	**************** ************* ************	***
서남	독산 (금천구)	범안로 확장	****************** ************** ************** ******************************* *******	***************** ***************** *************** *****	****
	시흥 (금천구)	박미빗물펌프장 다목적문화체육센터 건립	************************************ **************** ************** ***************	************** ************* ******************** *****	***
		시흥2동 거주자우선주차장 복합화사업	******************************************	******************* ****************	***
		백산초등학교 지하주차장 조성사업	****************** ************	*************** **************	***
	가산 (금천구)	디지털3단지~두산길 간 지하차도 건설	******************* ******** ************************** ********************* *****************	********************************* *****	***
	화곡2 (강서구)	등촌로 일대 그린뉴딜 지중화사업	************************************** ************ ********************* **************** ***********	***************** **********	***
	사당 (동작구)	민간개발사업과 연계한 생활SOC 확충(태평백화점 부지)	************************ *************** *******************	***************** ************ *************************** ******	***
동남	석촌 (송파구)	노외주차장을 활용한 공공체육‧복지‧편의 복합시설 건립	******************** ***************** **	**************** ***************** ***************	***
	송파 (송파구)	송파1동,방이2동 저층주거 밀집지역 CPTED 기법을 활용한 안심마을 조성	******************* ***	***************	***

******************

권역	지역	사업명	제외사유	비고
서남	화곡2 (강서구)	봉제산 무궁화공원 활용 공영주차장 조성	********************** ********************** ***************** ************	*** *************************

※ 중점관리사업 제외근거: ｢지역생활권계획 실행방안 수립 및 운영기준｣(’21. 10.)

5.3.7. 관리사업 중 시 및 자치구 담당부서에서 사업추진이 불가하다고 판단하는 사업의 경우에는 시 및 자치구 주관부서와의 협의를 거쳐 관리사업에서 제외시킬 수 있다.

5.3.8.	중점관리사업의 경우 시 및 자치구 담당부서에서 예산확보 지연 등의 사유로 사업이 지연되는 경우 시 및 자치구 주관부서와의 협의를 거쳐 관리사업으로 변경할 수 있다.

□ 향후 계획

ㅇ ’23. 12. : 지역생활권 실행방안 중점관리사업 추진실적 점검(4분기)

붙임  1. 지역생활권 실행방안 중점관리사업 세부추진현황 1부.
2. 중점관리사업 추진사항 관리카드 1부.  끝.