문서번호	급수운영과-9550
결재일자	2023. 11. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	급수운영과장	급수부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
박찬종	이상환	송헌영	권민		11/07
					유연식
협 조
	기획예산과장			문병기
	주무관			김다은

공공기관 내 스마트 수질관리시스템 추진 계획

(2024년도 시민참여예산 사업)

2023. 10. 19. (목)

상수도사업본부

(급 수 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

공공기관 내 스마트 수질관리시스템 추진 계획

(2024년도 시민참여예산 사업)

급수부장 :송헌영☎3146-1401 급수운영과장 :이상환☎1460 담당 :박찬종☎1461

시민이 직접 제안한 시민참여예산사업을 추진하여 수돗물 사고에   대한 공공의 책임성 증가됨에 따라 원인분석 및 예방대책 등을 마련

신뢰받는 아리수 정책을 실현하기 위함

Ⅰ		추진개요

□ 관련근거

○ 지방재정법 제39조(지방예산 편성 과정의 주민참여)

○ 2024년 시민참여예산사업 환경·행정분야 기획제안형 사업으로 선정 통보

※ 재정담당과-11420(2023.09.13)호, 2024년 시민참여예산사업 최종 선정      결과 알림 및 예산편성 요청

□ 추진경과

○ ’23.03.06 ~ 03.28 : 제안사업 공모(재정담당과)

○ ’23.05.22 : 제안사업 적격 검토(급수운영과)

○ ’23.07.05 : 환경·행정분야 심사대상 사업으로 확정(재정담당관)

○ ’23.07.14 : 제안사업 구체화 및 통폐합(급수운영과)

○ ’23.07.24 : 민간예산 협의회 숙의·심사결과 "시민투표 대상 확정"

- 민간예산 협의회 환경·행정부야 회의참석 사업설명 및 질의응답(급수부장 외2)

○ ’23.08.14 ~ 09.08 : 최종사업선정 시민투표(엠보팅)

○ ’23.09.13 : 최종 선정결과 알림 및 예산편성 요청(재정담당관)

Ⅱ		사업개요

□ 선정사업

○ 사업기간 : 2024. 1.  ~ 2024. 12.

○ 사업규모 : 시민참여예산사업 확정된 서울 소재 공공기관 5개소에            "스마트수돗물 수질관리 시스템 설치"

○ 선정금액 : 450백만원(신청 980백만원 10대 → 선정 450백만원 5대)

□ 시행방법 : 본부에서 "협상에 의한 계약 방식"으로 용역 시행

□ 소요예산 : 450백만원

○ 수질자동측정기 설치비 250백만원, 시스템 개발 및 설치비 175백만원,     유지관리비(소모품, 전기, 통신 등) 25백만원

Ⅲ		사업 추진계획

□ '24년 시행 계획

○ 사 업 명 : 공공기관 내 스마트수돗물 수질관리시스템 설치

○ 사업기간 : 2024. 1.  ~ 2024. 12.

○ 사업성격 : 신규 / 경상사업

○ 사 업 비 : 450,000천원(단년사업)

※ 시민참여예산사업은 단년사업만 가능

- 수질자동측정기 설치 : 250,000천원(50,000천원×5대)

- 시스템 개발 및 설치 : 175,000천원(35,000천원×5대)

- 유지관리비(소모품, 전기, 통신 등) : 25,000천원(5,000천원×5대)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 지원사업성시설비

○ 추진방법 : 본부에서 '협상에 의한 계약' 방식으로 용역계약 시행

○ 사업목적 : 대지경계선 이후 수질관리는 민간에 일임하고 있으나 수돗물             사고에 대한 공공의 책임성 증가에 따라 원인분석 및 예방대책             마련 등 사전대책 필요성 대두

○ 주요내용 : 공공기관내 스마트 수돗물 수질관리시스템 구축 및 유지관리

□ 시민참여예산 사업 진행절차

계획수립 및 설치대상 선정	➡	계약자(업체)선정	➡	설치 및 부대공사	➡	물품검수 및 완료
▪ '23.10~'24. 1월		▪ '24. 2.~3월		▪ '24. 4.~10월		▪ '24.10.~12월

Ⅳ		향후계획

□ '24년 설치대상 공공기관 선정(`23. 10~12.)

□ '24년 세부 사업추진 계획 수립('24. 1.)

□ 용역발주 및 계약체결(`24. 2~4월)

○ 용역발주 및 제안서 평가('24. 3월)

○ 계약체결('24. 4월)

□ 스마트수돗물 수질관리시스템 설치 및 부대공사 시행(`24. 4~10월)

□ 사업완료('24.11~12월)

○ 시스템 효과성 검증('24. 11월~)

Ⅴ		행정사항

□ 기존 수질자동감시시스템과 연계하여 연구·개발 사업으로 시범설치 추진 및 검증결과에 따라 사업 시행여부 결정(급수운영과)

□ 스마트수돗물 수질관리시스템 효과성 분석 및 검증(서울물연구원)

Ⅴ		기대효과

□ ICT 기반 스마트 수질관리 시스템 시범설치로 수질상태를 실시간으로      감시하여 시민들에게 수돗물 안정성 강화 및 신뢰도 제고

붙임 : 2024년 시민참여예산사업 최종 선정결과 및 예산편성 요청 공문 1부. 끝.