하나되는 중구, 함께하는 중구
	서울특별시 중구
수신	내부결재
(경유)
제목	준공기한 연기[장충-8소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역]

우리 구에서 시행중인 『장충-8소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기하고자합니다.

1. 용 역 명 : 장충-8소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역

2. 용 역 사 : *****************

3. 용 역 비 : *******************************************

4. 계약일자 : ****************************

5. 준공기한 연기

구분	당 초	변 경	비고
***	***************************	*****************************	*******

6. 연기사유 : 기본 및 실시설계 자문회의 의견에서 하수관로 추가 조사 및 악취조사 등 현장조사와, 소구역 가이드라인 변경으로 인한 추가 및 변경된 내용 반영함에 따라 절대공기가 부족하여 준공기한을 연기하고자함.

붙 임 : 1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 검토보고서 1부.  끝.

주무관	최인영		하수팀장	이성하		치수과장	김규엽		안전건설교통국장	11/07
정욱성
협조자	주무관	김민정		계약팀장	왕지영		재무과장	조덕진
기획재정국장	송인상
시행	치수과-23878	(	2023. 11. 7.	)	접수		(		)
우	04558	서울특별시 중구 창경궁로 17 (예관동)	/	http://www.junggu.go.kr
전화	3396-6132	/전송	02-3396-8851	/	ciyciy@junggu.seoul.kr	/	부분공개(5)