아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	[감재배정요구승인요청] 장월교 개축공사 통계목 변경을 위한 감재배정

「장월교 개축공사(장기계속)」와 관련하여 준공기한 연장으로 건설사업관리용역 비용이 부족한 실정으로 통계목 변경을 위한 감재배정요구승인요청을 하고자 합니다.

가. 관련근거

- 장월교 개축공사(장기계속) 예산 통계목 변경 검토 보고(교량안전과-7437,2023.11.1)

가. 예산변경 요청 내역

(단위 : 천원)

예 산 과 목					예 산 현 액	변경액		변경후 예산액
정 책	단 위	세부	편성목	통계목		증	감
교량관리	일반교량관리 (도시개발특별회계)	장월교 개축공사	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	*********	*	******	*********
				감리비 (401-02)	*******	******	*	*******

나. 변경사유 : 공사기간 연장, 주요 부재 강교의 시공품질 및 안전관리를 위한 건설사업관리기술인 투입기간 연장.

붙임 : 감재배정요구승인요청서 1부.  끝.

주무관	이재우		교량기획팀장	민형일		교량안전과장	11/08
조현석
협조자
시행	교량안전과-7905	(	2023. 11. 8.	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110, 서울특별시청 11층 교량안전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-1970	/전송	02-2133-1429	/	ohlove4u@seoul.go.kr	/	부분공개(5)