문서번호	기전과-12155
결재일자	2023. 11. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
최민규		채충일	11/08
			차창훈
협 조
	주무관			이래운

『동작지하차도 진입차단설비 전기공사』

설계변경 검토 보고

2023.11.7.(화)

남부도로사업소

(기 전 과)

『동작지하차도 진입차단설비 전기공사』

설계변경 검토 보고

기전과장 :채충일☎3284-5430  담당 : 최민규☎5435

「동작지하차도 진입차단설비 전기공사」와 관련, 시공사로부터 제출된 설계변경 보고서에 대하여 검토하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		관 련 근 거

ㅇ「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제74조

(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

ㅇ「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제9장(공사계약 일반조건)

제6절(공사 설계의 변경) 및 제7절(계약금액의 조정)

ㅇ「2023년 동작지하차도 진입차단설비 전기공사 설계변경보고서 제출 건」

(근대 20*******01(2023.11.7.))

Ⅱ		공 사 개 요

ㅇ 공 사 명: 2023년 동작지하차도 진입차단설비 전기공사

ㅇ 공사내역: 진입차단설비 전원선, 통신선 배선 및 배관 설치 1식

ㅇ 계약기간: 2023. 9. 15.~2023. 11. 10.

ㅇ 계약상대자: ***************

ㅇ 계약금액: ************

Ⅲ		추 진 경 과

ㅇ '23.  8. 18. : 동작지하차도 진입차단설비 설치 계획 수립

ㅇ ’23.  8. 21. : 전기공사 실시설계 시행

ㅇ ’23.  9.  5. : 전기공사 발주

ㅇ ’23.  9. 18. : 전기공사 착공

ㅇ ’23. 10. 12. : 전기공사 설계변경(1차) 시행

ㅇ ’23. 11.  6. : 전기공사 실정보고 검토 시행

Ⅳ		설계변경 검토

ㅇ 주요 실정보고 내역

구분	공 종	변경 전	변경 후	단위	변경사유
*********	**************	**	*	*	*********
	**************	***	***	*
	**************	***	***	*
	**********************	**	**	*
	*****************	*	*	*
	*****************	*	*	*
	******************	***	**	*
	******************	**	*	*
	******************	***	***	*
	***************	**	*	*
	***********	***	***	*
	**************	**	*	**
	****************	*	**	**
	*******************	*	*	*
	*******************	*	**	*
	****************	*	**	*
	*********************	*	*	*
	********	**	**	**
	*****	*	**	**

구분	공 종	변경 전	변경 후	단위	변경사유
***	*****	*********	*********	*	*********
	*****	*******	*******	*
	*****	*********	*	*	******************
	*****	*********	*	*
	*********	*******	*	*
	*********	*********	*********	*	*********

ㅇ 공사비 변경금액                                           (단위: 원)

구 분		공 사 비		증 • 감
		당 초	변 경
* * *	****	**********	**********	************
	***	*********	*********	**********
	****	**********	**********	*************

- 예산과목 : 남부도로사업소 기전과, 재해 및 재난예방, 재난 예방 및 복구, 재난예방(재난관리기금 재난계정), 시설비 및 부대비, 시설비(예산편성부서 : 재난안전관리실 재난안전정책과)

Ⅴ		보고자 검토의견

ㅇ 보고자 검토의견

- 시공사로부터 제출된 설계변경 보고서 내용이 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제9장 제6절에 해당되어 적정하다고 판단되어 승인하고자 하며,

- 실제 시공에 따른 물량 정산 및 제경비(보험료 및 산업안전보건관리비 등) 정산·반영하여 설계변경 시행하고자 함.

Ⅵ		향 후 계 획

ㅇ '23. 11.  8. : 설계변경 시행

ㅇ '23. 11. 10. : 공사 준공

붙임  1. 실정보고내역서 1부.

2. 계약검증확인서 1부.

3. 시공사 설계변경 보고서 1부.  끝.