문서번호	급수운영과-19592
결재일자	2023. 11. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
손성우	신중선	11/08
		代신중선
협 조

현장 실정 검토보고-2차

(2023년 논현동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사)

2023. 11

강남수도사업소

(급수운영과)

현장 실정 검토 보고-2차

(2023년 논현동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사)

"2023년 논현동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사"와 관련하여 감독처인 서울시설공단으로부터 현장실정 보고서가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

※관련문서: 서울시설공단 공사감독2처-13267(2023.10.24.)호

Ⅰ		현 황

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명: 2023년 논현동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사

ㅇ 공사기간: 2023.05.02. ~ 2023.11.30.

ㅇ 도 급 비: ************

ㅇ 시공내용: *******************

ㅇ 도 급 자: **************

ㅇ 발 주 처: 강남수도사업소(급수운영과)

Ⅱ		공단 요청내용

□ 중간집하장 변경

ㅇ 현황 및 문제점

- 당초 설계는 현장에서 3㎞ 이내로 중간집하장을 선정하도록 되어있으나, 3㎞이내에 적정한 부지를 선정할 수 없어 변경이 필요한 실정임.

ㅇ 변경 중간집하장 현황

- 당초 : 기준거리 3㎞

- 변경 : 최단거리 13.3㎞ (신사동 657번지 ↔ 경기도 구리시 토평동 731-1)

ㅇ 중간집하장 위치 및 현장사진

ㅇ 공단 검토의견

- 확보된 중간집하장 부지의 현장확인 결과 토사, 폐기물 반입 및 자재 적치에 적합한 부지면적을 확보하였으며, 진출입로 상태가 양호하여 중간집하장으로 사용하기 적정한 것으로 판단됨.

- 시공사에서 요청한 현장에서 중간집하장까지 최단거리(13.3km) 중 서울시 경계부까지(8.46km)를 반영하는 것이 적정하다고 판단됨.

- 운반거리, 운반속도 등의 산출기준은 적정하다고 판단됨.

- 부지임대료 미발생에 따른 임대료 4,059,670원은 미반영함이 타당하다고 판단됨.

- 단가변경 항목 : 파쇄물운반, 토사소운반, 잔토소운반

- *******************************

□ 사토장 변경

ㅇ 현황 및 문제점

- 당초 수도권 매립지로 반입하도록 설계되었으나, 토사 반입기준 및 방법 변경으로 사토장 변경이 필요한 실정임.

※관련문서 : 급수운영과-15838(23.09.12.)호

ㅇ 변경 사토장 현황

- 당초 : 집하장 ~ 수도권매립지(57.6㎞)

- 변경 : 구리시 토평동 731-1 ~ 양평군 양평읍 공흥리 650(40.4㎞)

ㅇ 사토장 위치 및 현장사진

ㅇ 운반거리 및 운반속도 산출

ㅇ 사토장 변경에 따른 운반단가

구분	명칭	규격	단가	개략공사비
당초	잔토처리 (0.7상차비별도)	24DT, 집하장→사토장(57.6km)	*******	***********
변경		24DT, 집하장→사토장(40.4km)	*******

ㅇ 공단 검토의견

- 수도권 매립지 토사반입 불가로 시공사에서 요청한 사토장 변경은 적절하다고 판단됨.

- 변경 사토장 확인결과 충분한 부지면적을 확보하고 있으며 진입로, 토사반입동의서 등 사토장으로 사용하기에 적합하다고 판단됨.

- 운반거리, 운반속도 등의 산출기준은 적정하다고 판단됨.

***********************************

Ⅲ		사업소 검토의견

□ 중간집하장 변경

ㅇ 강남구 관내 여건을 고려하여 중간집하장 변경 및 이에 따른 서울시설공단이 검토한 단가 변경은 적정하다 판단됨.

□ 사토장 변경

ㅇ 수도권 매립지 사토 불가에 따른 신규사토장 적용 및 이에 따른 서울시설공단이 검토한 단가 변경은 적정하다 판단됨.

Ⅳ		행 정 사 항

□ 서울시설공단에 회신

ㅇ 상기 검토의견과 같이 변경사항에 대해 타당하다 판단되므로 향후 설계변경 시 증·감분에 대하여 적용토록 서울시설공단에 회신코자 함.

붙임: 1. 현장실정 검토보고 관련 공문(서울시설공단) 1부.

2. 현장실정보고(시공사) 1부.

3. 변경내역서 1부.  끝.