문서번호	토목부-20786
결재일자	2023. 11. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	토목설계과장	토목부장		시설국장
박성준	박운용	이임섭		11/08
				안대희
협 조
	주무관		김종혁

- 녹번천 복개철거 및 복원사업 기본 및 실시설계 -

용역 재개 및 준공기한 연기 검토보고

2023. 11.

도시기반시설본부

토목부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

- 녹번천 복개철거 및 복원사업 기본 및 실시설계용역 -

용역 재개 및 준공기한 연기 검토보고

『녹번천 복개철거 및 복원사업 기본 및 실시설계용역』투자심사 결과에 따라 설계용역 및 건설사업관리용역을 재개하고 준공기한 연기에 대하여 검토보고 드림.

□ 추진근거

ㅇ「2023년 제8차 투자심사위원회 개최결과 알림」

(재정담당관-13110, '23.10.25.)

ㅇ「녹번천 복개철거 및 복원사업 재투자심사 결과 및 조치계획 알림

(치수안전과-19021, '23.10.31.)

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : 녹번천 복개철거 및 복원사업 기본 및 실시설계

ㅇ 사업구간 : 은평구 녹번동 161-7 ~ 은평구 응암동 91-9

ㅇ 사업규모 : 녹번천 (연장 750m, 폭 15m)*

*************************

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 추진현황

ㅇ ’18. ~ ’20. : 복개하천 중심의 하천복원 종합계획(치수안전과)

ㅇ ’20.08.    : 타당성조사 검증 (서울연구원 공공투자관리센터)

*******************************************

ㅇ ’20.10.27. : 市 투자심사 통과********************

ㅇ ’21.06.01. : 기본 및 실시설계 용역 착수

ㅇ ’22.10.04. : 사업계획 변경*****************************

*********************************************

***************************************

ㅇ ’22.10.18. : 건설사업관리용역 일시 중지

ㅇ ’22.12.07. : 설계용역 일시 중지

**************************************************

**********************************************

ㅇ ’23.07.04. : 타당성재조사 결과 통보 (LIMAC ⇒ 치수안전과)

***************************

ㅇ ’23.10.20. : 市 투자심사위원회 본회의 개최

**************************************************

ㅇ ’23.10.31. : 복원사업 추진계획 변경사항 통보 (치수안전과 ⇒ 토목부)

*******************************************************

*****************************

************************************************

□ 조치계획

*****************************

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************

**********************************

*******************************************************************************************************

□ 행정사항

ㅇ ’23.11. : 실시설계 재개 및 준공기한 연장 계약

붙임 : 치수안전과 사업계획 방침서(`23.10.31) 1부.  끝.