문서번호

도로과-23398

주무관

도로조명팀장

도로과장

안전건설교통국장

김민경

이성일

전영호

11/09

등록일자

결재일자

2023. 11. 9.

代신용호

공개여부

대시민공개

협 조

「한강로동 일대 노후 보안등 개량공사」

준공기한 연기 검토보고

용  산  구

(도 로 과)

「한강로동 일대 노후 보안등 개량공사」

준공기한 연기 검토보고

우리 구에서 시행 중인「한강로동 일대 노후 보안등 개량공사」와 관련하여 아래와 같이 준공기한 연기 사유가 발생되어 보고 드림

1		공사개요

□ 공 사 명 : 한강로동 일대 노후 보안등 개량공사

□ 공사내용 : LED보안등 개량 327등, 신설 10등

□ 공사기간 : 2023. 6. 15. ~ 2023. 11. 11.

□ 계약금액 : 금216,675,590원(금이억일천육백육십칠만오천오백구십원)

□ 도 급 자 : ㈜코스탈파워  대표 김의선

2		보고내용

□ 준공기한 연기 사유

- 관련 법령및조례인 좋은빛위원회 심의결과에 의해 관급자재 납기가 지연되었으며,

- 낙찰차액 및 집행잔액을 사용하여 보안등 신설 민원사항을 처리하고 노후 보안 등주를 추가 교체하는 등 과업범위를 추가함에 따라 공사기간 변경이 필요한 실정

□ 준공기한 변경 내역

구분	당초	변경
공사기간	2023. 6. 15. ~ 2023. 11. 11.	2023. 6. 15. ~ 2023. 12. 15.

- 연기사유 귀책소재 : 용산구청

- 지체상금 부과여부 : 미부과

3		향후일정

□ 2023. 11.  9. : 준공기한 연기 요청(재무과)

□ 2023. 12. 15. : 공사 준공.  끝.