젊은경제·바른행정·신속성장, 바로 서대문!
		서 대 문 구
수신자		내부결재
(경유)
제목	설계변경(제1회,정산)시행[2023년 서대문구 라이다 측량 및 GIS DB 구축용역(1구역)]

우리 구에서 시행 완료한 하수도공사 6건에 대하여 GIS DB 구축을 위해 시행 중인 『2023년 서대문구 라이다 측량 및 GIS DB구축용역(1구역)』을 다음과 같이 설계변경(제1회, 정산) 시행하고자 합니다.

1. 용 역 명 : 2023년 서대문구 라이다 측량 및 GIS DB구축용역(1구역)

2. 용역개요

- 당초 : 공공하수관로 측량(L=3.243km), 사각형거 라이다 측량(L=0.662km)

- 변경 : 공공하수관로 측량(L=3.280km), 사각형거 라이다 측량(L=0.683km)

3. 용역기간 : 2023.10.23. ~ 2023.11.15.

4. 계약상대자 : 주식회사 한국도시공간 대표 이충헌

5. 설계변경 사유

- 본 용역은 2023년도 신설·개량된 공공하수도 및 보수보강된 사각형거를 현황조사, 절대측량, 정위치·구조화 편집 및 공공측량 성과심사를 득하여 하수도전산시스템에 탑재하는 용역으로,

- 과업대상 사업 중 설계변경(준공) 시행한 공사구간으로 현장여건 의해 하수시설물 조사 측량 연장의 변경발생에 따른 설계내역 변경

6. 용역비

❍ 설계변경 현황

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증・감 액
총 용 역 비		80,880,000	72,080,000	감)	8,800,000
도 급 비	공급가액	73,527,273	65,527,273	감)	8,000,000
	부가가치세	7,352,727	6,552,727	감)	800,000
	소계	80,880,000	72,080,000	감)	8,800,000

※ 계약심사, 일상감사 및 설계변경심사위원회 심사 대상 해당사항 없음

붙 임  1. 관련 방침서 1부.
2. 설계변경 사유서 1부.
3. 설계변경 내역서 1부.
4. 합의각서 1부.
5. 예산과목 1부.  끝.

주무관	박지윤		하수팀장	전하현		치수과장	代신문식		안전건설국장	11/10
김태중
협조자	주무관	양지숙		계약팀장	문혜선		재무과장	代조서은
시행	치수과-20765	(	2023. 11. 10.	)	접수		(		)
우	03718	서울 서대문구 연희로 248	/	https://www.sdm.go.kr
전화	02-3140-8317	/전송	02-330-8945	/이메일	jyoonb@sdm.go.kr	/	부분공개(5)