문서번호	시설관리과-26203
결재일자	2023. 11. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장	중부수도사업소장
이승환	이유찬	이동욱	11/10
			장화영
협 조
	행정지원과장		은정호

준공기한 연기 검토보고(2023년 종로 장기사용 배수관 정비공사)

「2023년 종로 장기사용 배수관 정비공사」

준공기한 연기 검토보고

2023.  11. 9. (목)

중부수도사업소

(시설관리과)

************************

준공기한 연기 검토보고

「**********************」와 관련하여 감독청인 서울시설공단에서 제출한 준공기한 연기 보고서에 대한 검토 보고드림

□ 관련근거

ㅇ 서울시설공단 공사감독2처-14398(2023.11.09.)호

- 준공기한 연기원 검토보고서 제출(**********************)

□ 공사 개요

********************************

************************간

*************************************

*********************

************************************

**************************

***************************

□ 공사진행 현황

*******************************

********************************

************************************

**********************************

*****************************

□ 시공사 준공기한 연기요청

ㅇ 준공기한 연기 사유 및 기간(총 180일)

******************************

********************************************

********************************************************

**********************************

*********************

***************************************************

□ 검토의견

ㅇ 서울시설공단 검토

- 유관기관 협의지연 및 지장물 이설 등 3건의 사유로 인하여 관로부설에 필요한 절대공기가 부족하므로 시공사에서 요청한 준공기한을 연기(180일)하여 잔여공종 및 준공처리에 만전을 기함이 타당하다고 판단됨

ㅇ 사업소 검토

- 위 연기사유 등으로 시공이 지체됨을 감안하여, 공사기간의 부족으로 연기함이 타당함

ㅇ 준공기한 연기내용

*****************************************

****************************************************

ㅇ 지체상금 부과여부: 미부과

□ 조치계획

ㅇ 검토결과 준공기한 연기 사유가 타당하므로 준공기한 변경 시행하고 그 결과를 공단으로 회신하고자 함.

붙임  준공기한 연기요청 관련서류 1부.  끝.