아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	북부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	준공기한 연기 요청(북부수도사업소 월계2중블록)

우리 사업소에서 추진하고 있는 『북부수도사업소 월계2중블록 공급체계 공사』의 준공기한을 아래와 같이 연기하고자 합니다.

가. 공사명 : 북부수도사업소 월계2중블록 공급체계 공사

나. 계 약 자 : 원일이엔씨㈜ 대표 가은주

다. 계약금액 : 660,065,250원

라. 공사기간  당초 : 2023년 04월 20일 ~ 2023년 11월 15일

변경 : 2023년 04월 20일 ~ 2023년 12월 11일 (총 26일 연기)

마. 연기사유 귀책소재 : 북부수도사업소

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

사. 연기사유 : 교통용역 지연으로 인한 공사연기

붙임  1. 준공연기 관련 서류 1부.

2. 합의서 1부.  끝.

	급 수 운 영 과 장
주무관	박상권		급수관리팀장	최용진		급수운영과장	11/13
송병욱
협조자
시행	급수운영과-17799	(	2023. 11. 13.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935, 4층 (번동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3343	/전송	02-3146-3389	/	psk300@seoul.go.kr	/	부분공개(5)