문서번호	급수운영과-17795
결재일자	2023. 11. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장		북부수도사업소장
박상권	최용진	송병욱		11/13
				代이재남
협 조

『북부수도사업소 월계2중블록 공급체계 공사』

준공기한 연기 검토보고

2023. 11.

북부수도사업소

〔급수운영과〕

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

『북부수도사업소 월계2중블록 공급체계 공사』

준공기한 연기 검토보고

『북부수도사업소 월계2중블록 공급체계 공사』와 관련, 계약상대자로부터 공사기한 연기요청서가 접수되어 이에 대해 검토 후 보고 드림.

※ 서울특별시시설관리공단 공사감독2처-14491(2023.11.10.)호와 관련임.

1		공사현황

○ 공 사 명 : 북부수도사업소 월계2중블록 공급체계 공사

○ 공사기간 : 2023. 04. 20 ~ 2023. 11. 15.

○ 도 급 비 : 660,065,250원

○ 공사개요 : 관부설 D=200~500mm, L=704m

○ 도 급 자 : 원일이엔씨㈜ 대표 가은주

○ 발 주 청 : 북부수도사업소 급수운영과

2		공단 검토의견

◯ 공 정 율 : 98%(2023년 11월 09일 현재)

◯ 완료공종 : D 200~500mm, L=630m

◯ 잔여공종 : 현장정리 및 설계변경

◯ 준공기한 연기 사유

- 교통소통대책 수립 및 자문회의 시행에 따른 실착공 지연 : 62일

※ 관련근거 ☞ 교통소통대책자문회의 최종결과 통보

[교통운영과-8976(2023.06.22.)]

- 준공기한 연기 요청일 : 상기 연기일수 산정 62일 중 26일 요청

3		사업소 검토의견

◯ 검토의견

- 시설공단에서 보고한 준공기한 연기 요청은 타당한 것으로 판단되며, 잔여공정인 설계변경 및 준공처리에 만전을 기하고자 함

4		처리의견

◯ 준공기한 연기 검토 결과

- 상기와 같은 사항으로 공사기간 연기가 불가피한 실정이기에 아래와 같이  준공기한을 연기하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

구 분	기 간	비 고
당 초	2023년 04월 20일 ~ 2023년 11월 15일
변 경	2023년 04월 20일 ~ 2023년 12월 11일 (총 26일 연기)

◯ 지체상금 부과여부 : 미부과

- 준공기한 연기에 따른 귀책사유가 우리 사업소에 있는 바, 지체상금

미부과

붙임  준공기한 연기 검토보고 관련서류 각 1부.  끝.