급수공사 연기 보고서(신설-40)

시    행

급수운영과-18616

시행일자

2023. 11. 13.

수 신 자

내부결재

접수번호

접수일자

공개여부

대시민공개

주무관		급수관리팀장	급수운영과장			결재
최박		代신승무	11/13
			이규희
협 조

명에 의거 풍납동 외 11개동 상수도공사 담당업무 수행 중 아래와 같은 사유가 발생하여 급수공사 준공기한을 연기하고자 합니다.

□ 공사현황

○ 공사명: 2023년 풍납동 외 11개동 상수도공사

○ 계약상대자: 파워개발(주)  대표 박석흠

□ 연기내역

연번	주 소	지시번호	당초	변경	비고
1	삼전동 69-16	신설-40	2023.11.01.~ 2023.11.14.	2023.11.01.~ 2023.11.30.

○ 연기사유

- 신설-40: 공사현장 자재적치 및 건축공사 공정 지연으로 수용가에서 공사연기 신청함.

□ 지체상금 부과여부

○ 지체상금 미부과

□ 조치의견

○ 변경 공사기간으로 연기하고자 함.  끝.