문서번호	시설관리과-26396
결재일자	2023. 11. 13.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
임상근	이유찬	11/13
		이동욱

「2023년 효자동 외 9개동 장기사용 배급수관 정비공사」

현장 실정보고(4차) 검토

2023. 11. 13. (월)

중부수도사업소

(시설관리과)

「2023년 효자동 외 9개동 장기사용 배급수관 정비공사」

현장 실정보고(4차) 검토

시설관리과장: 이동욱☎3146-2190 시설운영팀장: 이유찬☎2191 담당: 임상근☎2198

「2023년 효자동 외 9개동 장기사용 배급수관 정비공사」와 관련하여 감독청인 서울시설공단에서 제출한 공사현장 실정보고(4차)에 대한 검토내용을 보고드림

□ 관련문서

ㅇ 서울시설공단 공사감독2처-14594(2023. 11. 13)호

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명: 2023년 효자동 외 9개동 장기사용 배급수관 정비공사

ㅇ 공사개요: 배급수관 부설 D= 100~300mm, L= 1,000m

ㅇ 공사기간: 2022. 4. 24. ~ 2023. 12. 15.

ㅇ 계약금액: 금490,214,080원

ㅇ 계 약 자: (주)화랑건설   대표 박순임

ㅇ 감 독 처: 서울시설공단 공사감독2처 강진혁

□ 감독처 실정보고

① 4구간 공사 제외

ㅇ 현황 및 문제점

- 시·종점부 시험굴착 시 지하매설물 과다로 기존관 확인이 불가능한 상황임.

- 또한, 도로폭(1~2m)이 매우 협소하여 시장 골목 인근 상가 구조물 파손 우려가 있고, 콘크리트 포장 깨기 작업 시 충격으로 건물 균열이 발생할 수 있어   작업이 어려운 실정임.

- 4구간 현장 사진 (D= 100mm, L= 약 65m)

ㅇ 감독처 검토의견

- 지하매설물 과다로 공사 진행에 어려움이 많으며, 안전문제를 야기할 수 있어 해당 구간 타절은 타당하다고 판단.

② 5구간 공사 제외

ㅇ 현황 및 문제점

- 5구간은 주택가의 차량이 수시로 통행하는 구간으로 굴착 작업 시 차량 통제가 필요하나 우회도로 확보가 불가능하여 인근 주민들에게 큰 불편을 초래하고, 야간 굴착은 주택 밀집 지역으로 소음 문제로 불가능한 실정임.

- 현황 및 위치도 (D= 100mm, L= 약 55m)

ㅇ 감독처 검토의견

- 해당 구간은 공사 시 유일한 출입로를 통제하여 주민들의 큰 반발이 있으며 야간 공사는 주택 밀집 지역 특성상 어렵다고 판단됨.

③ 7구간 공사 제외

ㅇ 현황 및 문제점

- 7구간 도로폭(1~2m)이 매우 협소하여 인접 한옥 주택 및 담장 파손 등 위험이 있고, 공사 진행 중 주민들의 통행이 불가하여 반발이 우려됨. 또한 현장 주변 건설장비 투입 시 교통혼잡으로 인한 시민불편사항 등으로 공사 진행에 어려움이 있음.

- 현장 사진 (D= 100mm, L= 약 55m)

ㅇ 감독처 검토의견

- 해당 구간 굴착 작업 시 인근 건물의 파손 가능성 및 다수의 시민불편사항이 야기되어 공사 진행이 어렵다는 시공사의 의견 수렴.

④ (8구간) 공사 제외

ㅇ 현황 및 문제점

- 8구간은 기존 담장 하부에 노후 주택이 밀집되어 있는 지역으로, 콘크리트 포장 구간 특성상 굴착 시 굴착기를 이용한 깨기 작업이 동반되므로 그로인한 충격이 노후 주택 및 담장을 파손할 수 있음. 또한 현장 주변에 건설장비 투입 시 교통혼잡 등 시민불편사항이 발생하여 공사 진행이 어려운 실정임.

- 현장 사진 (D= 100mm, L= 약 160m)

ㅇ 감독처 검토의견

- 해당 구간 공사 시 노후 주택의 안전 위험이 있으며, 장비 진입이 불가능한 현장 여건 등 공사 진행이 어렵다는 시공사의 의견 수렴.

⑤ 9구간 공사 제외

ㅇ 현황 및 문제점

- 시험굴착 결과, 하수도 박스(상단 심도 H= 0.4 ~ 0.7m)로 국유지에 신설관 부설이 불가하고, 기존관 또한 사유지 하부에 매설되어 공사가 불가능한 실정임.

- 현장 사진 (D= 100mm, L= 약 170m)

ㅇ 감독처 검토의견

- 시험굴착 시 지하매설물로 인해 기존관을 찾을 수 없고, 하수도 박스 상단심도가 부족하여 신설관 부설이 불가능하다고 판단됨.

□ 사업소 검토의견

① 4구간 공사 제외

- 시험굴착 시 지하매설물 과다로 기존관 확인 및 신설관 부설이 불가능한 점 도로폭이 1~2m로 매우 협소하여 인접 상가 구조물이 파손될 수 있고 콘크리트 포장 깨기 작업 시 충격으로 건물의 균열이 발생할 수 있는 등 작업이 어렵다고 판단됨.

② 5구간 공사 제외

- 5구간은 굴착 작업 시 주택 밀집 지역 통행로(외길)를 전면 통제하여 인근 주민들에게 큰 불편을 초래할 수 있고, 야간 작업은 소음으로 인한 민원 사항으로 공사가 불가하다고 판단됨.

③ 7구간 공사 제외

- 공사 구간 도로 폭이 매우 협소하여 공사 시 인접 건물 등 파손 우려가 있고 보도 구간 전면 통제로 인한 시민 불편사항, 건설장비 투입 시 교통 혼잡 문제 등 감독처의 의견 수렴.

④ 8구간 공사 제외

- 콘크리트 깨기 작업 시 충격으로 노후 주택가 담장 파손 우려가 있고,

도로폭이 매우 협소하여 장비 진입이 어려운 점 타절 의견 수렴.

⑤ 9구간 공사 제외

- 도로 전폭에 대형 하수박스로 인해 신설 상수도관 부설에 필요한 최소 심도 부족으로 공사가 불가능함. (기존관은 사유지에 매설)

□ 조치 계획

ㅇ 서울시설공단으로 검토결과 통보하여, 설계변경 시 반영토록 함.  끝.