문서번호	방재시설부-13773
결재일자	2023. 11. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김광호		정현중	11/13
			이동훈
협 조
	주무관			김재웅

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사 -

안전관리비 추가 반영 실정보고

2023. 11.

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사 -

안전관리비 추가 반영 실정보고

당모래보도육교 철거후 임시 설치한 횡단보도 이용자의 통행안전을 위해  보행안전도우미를 배치하고 그 비용을 안전관리비에 반영코자 보고드림

※ 관련문서 : 이산2023-국회대로(건)-290호(2023.11.03.)

Ⅰ		공사개요

ㅇ 공 사 명 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사

ㅇ 위    치 : 양천구 신월IC ~ 화곡 지하차도 BOX 시점

ㅇ 사업규모 : 도로연장 1.22km, 왕복4차로 (지하차도 신설 995m)

ㅇ 공사기간 : 2018. 8. 8. ~ 2024. 12. 31. (착공일로부터 77개월)

ㅇ 도 급 비 : 91,827백만원

ㅇ 시공 / 사업관리 : 한신공영(주) 외 1개사 /  ㈜이산 외 3개사

Ⅱ		추진현황

ㅇ '22.03.~09. : 교통규제심의 및 자문회의

- 당모래육교 철거(임시신호등 및 횡단보도설치) 및 화곡지하차도 폐쇄

ㅇ '22.10.~'23.01. : 교통전환시행

- 국회대로 연속류 폐쇄(왕복8차로→왕복6차로)

ㅇ '23.01. : 당모래보도육교 철거

ㅇ '23.09. : 보행안전도우미 배치 구두지시(발주청) 및 배치운용(’23.10.)

ㅇ '23.11. : 안전관리비 추가 반영 실정 보고(건설사업관리단 → 도기본)

Ⅲ		실정보고 검토내용

□ 보행안전도우미 배치비용 안전관리비 반영

ㅇ 검토내용 : 보도육교 철거후 설치한 임시 횡단보도 이용자의 무단 횡단(신호 무시) 민원이 있었고, 도로공사 교통관리지침에 따라 보행 안내도우미을 배치하여 보행자 안전 조치

도로공사 교통관리지침 (국토교통부, ’18.11.)

공사장 설치로 보행자 도로가 차단되어 우회 보행자도로로 보행자를 안내할 경우 도로 공사장 전용 주의표지를 설치하며, 해당 관리청에서 보행자의 안전에 관하여 감시 및 직접 동선 안내가 필요하다고 판단될 경우 보행 안내원을 배치할 수 있음

ㅇ 임시 횡단보도 설치 및 보행안전도우미 배치

임시횡단보도 위치도
횡단보도 위치
임시횡단보도 현황	보행안전도우미 배치

ㅇ 물량 증·감 내역

항목	규격	단위	수 량			비고
			당초	변경	증·감
보행안전도우미	횡단보도구간	식	-	1	1

※ 횡단보도를 이용하는 보행자의 안전 통행유도 (’23. 10.~’24.12.) - 실물량 정산 예정

ㅇ 공사비 증·감 내역                                            (단위 : 원)

구 분	금 액(천원)			비 고
	당 초	변 경	증·감
직접공사비	-	-	-
간접비	322,973,890	379,462,332	56,488,442
공급가액	322,973,890	379,462,332	56,488,442
부가가치세(VAT)	32,297,389	37,946,233	5,648,844
도 급 액	355,271,279	417,408,565	62,137,286

Ⅳ		조치계획

ㅇ 보행안전도우미를 배치하여 임시 횡단보도 이용자의 보행안전을 도모하고, 건설공사의 안전관리에 필요한 비용으로 안전관리비 항목에 포함 시행

ㅇ 본 건은 시공사 귀책에 해당되지 않아 시공사는 신규단가(100%) 적용 요구하는 바, 관련 규정에 따라 단가 협의하고 그 결과를 반영하여 추후 설계변경 시행코자 함.

※ 협의가 이루어지지 않을 시「지방자치단체 입찰집행기준」제9장 계약일반조건제7절 계약금액의 조정에 따라 강제협의율[(신규100%+낙찰율)/2]을 적용

붙임 :  건설사업관리단 실정보고서 1부.  끝.