문서번호	공원녹지과-19513
결재일자	2023. 11. 13.
공개여부	비공개(5)
방침번호

주무관		자연생태팀장		공원녹지과장		도시관리국장
장지은		이덕신		석승우		11/13
						임창섭
협조

2024년 산사태 예방사업 추진 계획

2024년 산사태 예방사업 추진 계획

2023. 11.

[공원녹지과]

2024년 산사태 예방사업 추진계획

'24년 산사태 예방사업 후보지 조사결과 선정된 사업대상지(매봉산)에 대해 아래와 같이 예방사업을 추진하여 산사태 재난으로부터 주민의 생명과 재산을 보호하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

□ 2024년 산지방재사업 추진계획[산지방재과-11500호(2023.11.9.)]

Ⅱ		추 진 방 향

□ 여름철 집중호우 대비하여 우기 전(6월말)까지 사업 완료

□ 주변경관과 어울리는 사방시설을 반영하여 설치하고 가능한 한 자연이 훼손되지 않도록 시설물 최소화

Ⅲ		추 진 경 위

□ 2023. 2. 22.  2024년 산사태 예방사업 사업후보지 제출 요청

□ 2023. 4.  4.  사업후보지 제출(2개소)

○ 옥수동 436-9(매봉산), 금호동2가 산9-1(금호산)

□ 2023. 5. 15.  후보지 합동 현장 실사(서울시, 성동구, 외부전문가)

□ 2023. 11. 9.   2024년 산지방재사업 추진계획 시달(서울시)

○ 1개소 확정: 매봉산(옥수동 436-9), 사업비 112백만원

Ⅳ		사 업 개 요

□ 위    치: 매봉산(옥수동 436-9)

□ 사업내용: 산지사방 시설물 설치, 수목식재 등

□ 사업기간: 2023. 11. ~ 2024. 6.

□ 총사업비: 금112,420천원(국비 70%, 시비 30%)

○ 설계비: 6,867천원 / 공사비: 105,553천원

□ 위치도 및 현황사진

위치도	현황사진

Ⅴ		세부 추진계획

□ 산사태 취약지역 지정 및 해제 위원회 개최

○ 관련근거: 「서울특별시 성동구 산사태취약지역지정위원회 설치 및 운영에 관한 조례」 제4조

○ 참여인원: 10명(당연직 5, 위촉직 5)  ※ 임기기간: 2022. 1 ~ 2024. 1

○ 개최일자: 2023. 12. ~ 2024. 1. 중

○ 내   용: 지정 및 해제를 위한 열람공고, 취약지 지정

□ 실시설계용역 추진

○ 기    간: 2023. 11. ~ 12.

○ 소요예산: 금6,867천원

○ 업체자격: 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률」 제15조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제10조 제3항에 따른 산림기술용역업에 등록한 업체

○ 설계기준: 「서울형 사방시설 설계 및 시공기준」,  「사방사업의 설계 · 시공 세부기준」

□ 공사추진

○ 기    간: 2024. 3. ~ 6.

○ 소요예산: 금105,553천원

○ 시행방법: 지역제한 공개경쟁입찰

○ 입찰참가자격

- 산림조합(지역조합) 또는 산림조합중앙회, 산림사업법인(산림토목) 등록업체

- 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약일)까지 주된 사무소가 서울특별시에 소재한 업체

Ⅵ		향 후 일 정

□ 2023. 11. ~ 12.  실시설계용역 시행

□ 2023. 11.        설계심의, 산사태취약지역 지정을 위한 열람공고

□ 2024.  1.         산사태취약지역지정 위원회 개최 및 지정

□ 2024.  2.         계약심사 및 공사발주

□ 2024.  3. ~  6.  공사시행 및 완료

붙임  1. 2024년 산지방재사업 추진계획 알림(市 공문) 각 1부.

2. 위치도 및 현황사진 1부.  끝.