아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	용역 재개 및 변경계약 의뢰

우리 부에서 시행중인 '녹번천 복개철거 및 복원사업 기본 및 실시설계용역'과 관련하여 아래와 같이 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 변경사항 : 용역재개 및 계약기간 변경(용역비 변경 없음)

구 분	계약자	중지 기간	계약 기간
			당 초	변 경	비고
설계용역	㈜유신 외 3개사	*********************	'22.02.24. ~ '22.12.31.	************ **********	기간 연장
건설사업관리용역	㈜서경기술공사	*********************	'22.04.25. ~ '24.12.22.	************ **********	기간 연장

나. 변경사유 : 재투자심사 결과 및 조치계획(치수안전과)에 따른 실시설계 수행에 절대공기 11개월 필요

다. 귀책소재 : **********************

붙임  1. 방침서 1부.

2. 합의각서 각 1부.  끝.

	토 목 부 장
주무관	박성준		토목설계과장	박운용		토목부장	11/13
이임섭
협조자	주무관	김종혁
시행	토목부-21052	(	2023. 11. 13.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 청계청사 12층	/	http://seoul.go.kr
전화	02-6438-2155	/전송	02-6438-2199	/	ch83895@seoul.go.kr	/	부분공개(5)