아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	북부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	공사 준공기한 변경계약 체결 알림(북부수도사업소 월계2중블록 공급체계 공사)

1. 급수운영과-17799(2023. 11. 13.)호와 관련입니다.

2.『북부수도사업소 월계2중블록 공급체계 공사』건에 대하여 준공기한 변경계약을 아래와 같이 체결하였음을 알려드립니다.

가. 건      명 : 북부수도사업소 월계2중블록 공급체계 공사북부수도사업소 관내(노원, 도봉구) 교통소통대책 수립용역

나. 계약상대자 : *********************

다. 계약금액 : *****************************

라. 계약기간

당 초	변 경	비 고
2023. 4. 13. ~ 2023. 11. 15.	2023. 4. 13. ~ 2023. 12. 11.	준공기한 연기 (착공일자 : 2023. 4. 20.)

*************************

붙 임  1) 용역 변경계약서 1부.

2) 준공기한 연기보고서 1부.

3) 합의서 1부.

4) 변경 계약보증서 및 선급금보증서 각 1부.  끝.

	행 정 지 원 과 장
주무관	구명임		행정관리팀장	박은화		행정지원과장	代박은화		북부수도사업소장	11/14
代박희복
협조자
시행	행정지원과-19746	(	2023. 11. 14.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935, (번동)	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3245	/전송	02-3146-3279	/	mymullu@seoul.go.kr	/	부분공개(7)