문서번호	기전과-13948
결재일자
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
강준석		최경주	11/14 최연우
협 조

지하차도 조명설비 회로감시 설치 공사 계획

지하차도 조명설비 회로감시 설치

공사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 11.

서부도로사업소

(기  전  과)

지하차도 조명설비 회로감시 설치 공사 계획

서부도로사업소장 : 최연우☎300-8300 기전과장 : 최경주☎8390 담당 :강준석☎8397

우리 사업소에서 진행중인 지하차도 조명설비 감시시스템 설치 사업에 회로감시(회로별 전류값 및 메인 전압값 표출) 공사를 추가 진행하여  시민들이 지하차도를 안전하게 통행할 수 있는 환경을 조성코자 함

Ⅰ		추 진 근 거

□ 「도로터널 자동제어시스템 설치 및 운영기준 개정 알림」(도로시설과-6389호, 2023.11.08.)

Ⅱ		추 진 현 황

□ 지하차도 조명설비 감시 시스템 설치현황

시설명	퇴계로	증산	성산	모래내	서빙고	두무개	월드컵
원격제어	○	○	○	○	○	○	○
회로감시	○	○	○	○	○	○	-
시설명	신사	이태원	연희	의주로	잠수교 북단	남산2호 입구	비 고
원격제어	진행중	진행중	진행중	-	-	-
회로감시	-	-	-	-	-	-

※ 회로감시 : 회로별 전류값 표출로 전류값 변화에 따른 조명의 상세한 상태 감시 가능

□ 지하차도 조명설비 감시 시스템 설치 사업 현황

o 계약금액 : ***********

o 설치위치 : 지하차도 상황실, 신사, 이태원, 연희 지하차도

o 주요공정 : 지하차도 조명설비 원격제어, 회로별 점소등 모니터링

□「도로터널 자동제어시스템 설치 및 운영기준」관련 지하차도조명 자동제어시스템은 원격제어, 회로별 점소등상태, 회로별 전류값과 메인전원 전압값 표출되도록 구성해야 하지만,

도로터널 자동제어 시스템 예시

□ 금년 지하차도 조명설비 감시시스템 설치사업은 예산 부족으로 조명의 원격제어 및 점소등 상태감시만 설계하여 착수하였고 회로감시 설치공사(전류 및 전압 표출)는 예산확보 후 진행필요

Ⅲ		추 진 계 획

□ 추진 계획

o 남산2호 풍도 전기설비 개량공사(예산 : 도로시설물 노후 전력설비개량)

준공으로 발생한 집행잔액(낙찰차액)을 사용하여 회로감시 설치공사

(전류 및 메인전원 전압값 표출) 추가 시행

□ 공사 개요

o 공 사 명 : 지하차도 조명설비 회로감시 설치 공사

o 공사대상 : 신사, 이태원, 연희 지하차도

o 공사목적 : 조명설비를 회로별 감시함으로써 고장 등 상황에 조속히            대응하여 안전한 지하차도 통행환경 조성

o 공사기간 : 2023년 11월 ~ 12월

o 사 업 비 : ***********

o 계약방법 : 수의계약

- 지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 마목 및 제 30조 제1항 제2호(여성기업)

- 정보통신공사업법에 의한 정보통신공사업등록을 한 업체

o 예산과목 : 기전과, 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로시설물               노후 전력설비 개량, 시설비

□ 사전 절차

o 계약 심사 : 해당 없음

- 공사 : 추정금액 3억원 미만 정보통신공사 제외

Ⅳ		향 후 계 획

□ 계약의뢰 → 관리단속과

붙임 : 설계내역서 1부.  끝.