문서번호	기반시설과-3683
결재일자	2023. 11. 14.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
이균휴		이석근	11/14
			이유국
협조

[양화대교북단외 1개소 승강기 설치공사 ]

설 계 변 경   검 토 보 고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 11. 13. (월)

미래한강본부 시설부

(기반시설과)

[양화대교북단외 1개소 승강기 설치공사 ]

설 계 변 경   검 토 보 고

시설부장:이유국☎3780-0830 기반시설과장 : 이석근☎0675 담당 : 이균휴☎0665

우리 본부에서 추진중인 [양화대교북단외 1개소 승강기 설치공사]관련 공사현장 여건 및 실정보고를 반영하여 설계변경하여 공사준공에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		공 사 개 요

ㅇ 공사명: 양화대교북단외 1개소 승강기 설치공사(장기2차)

ㅇ 위  치: 마포구 합정동352-5 및 강남구 압구정동378-2

ㅇ 기  간: 2022.5.16.~2023.11.20.(2차:2023.1.6.~2023.11.20.)

ㅇ 도급비: 금3,150,374천원(2차:금1,650,374천원)

ㅇ 업체명: 에쓰와이이앤씨 주식회사

ㅇ 공사내용: 양화대교북단 및 동호대교남단 승강기 및 계단 설치

Ⅱ		설계변경내역

ㅇ 공사 현장 실정보고

- 공사 현장 여건에 따른 실정보고 반영

※기반시설과-1128호, 3612호

ㅇ 공사 기간 : 변동없음

- 총차: 변동없음(2022. 5.16.~2023.11.20.)

- 2 차: 변동없음(2023. 1. 6.~2023.11.20.)

ㅇ 사업비 변경내역

- 총사업비-                                         (단위:원)

구 분	총차(4회)				2 차(2회)
	변경전	변경후	증·감	변경전		변경후	증·감
총사업비	3,651,357,030	3,712,983,030	증)61,626,000	1,827,235,490		1,888,861,490	증)61,626,000
도급비	3,150,374,000	3,212,000,000	증)61,626,000	1,650,374,000		1,712,000,000	증)61,626,000
관급자재	55,098,540	55,098,540		7,660,490		7,660,490
계측관리	20,746,000	20,746,000		2,911,000		2,911,000
폐기물	24,348,000	24,348,000		16,193,000		16,193,000
전기총괄	400,790,490	400,790,490		150,097,000		150,097,000

-도급비(총차 및 2차)-                                 (단위:원)

구 분		총차(4회)			2 차 (2회)
		변경전	변경후	증·감	변경전	변경후	증·감
도급비계		3,150,374,000	3,212,000,000	증)61,626,000	1,650,374,000	1,712,000,000	증)61,626,000
도급비	공급가액	2,863,976,364	2,920,000,000	56,023,636	1,500,340,000	1,556,363,636	56,023,636
	부가세	286,397,636	292,000,000	5,602,364	150,034,000	155,636,364	5,602,364
공급가액		2,863,976,364	2,920,000,000	증56,023,636	1,500,340,000	1,556,363,636	증56,023,636
직접비	소계	1,839,268,444	2,010,692,512	증171,424,068	934,675,047	1,106,099,115	증171,424,068
	양화북단	802,576,531	843,357,678	증40,781,147	328,741,096	369,522,243	증40,781,147
	동호남단	1,03,6691,913	1,167,334,834	증130,642,921	605,933,951	736,576,872	증130,642,921
기타	재경비	1,024,707,920	909,307,488	감115,400,432	565,664,953	450,264,521	감115,400,432

-설계변경 세부내역

번호	건 명	변경내용 및 사유	공사비 증·감(천원)
1	장애인슬로프 구조변경 (양화북단)	-당초설계에는 ㄱ자 구조로되어 있으나 법규상 최소 기울기인1/12을 충족하지 못하여 ㄷ자형식 으로 변경하여 설치 -슬로프 길이증가: 15M→23.8M -난간:17m 증가	증5,158
2	보도 블럭 철거 및 설치(양화북단)	-기존보도블럭의 노후 및 규격이 부적정으로 신규 설치 및 보도블럭하부 침하방지 기초 콘크리트 타설 -보도블럭 철거 및 설치(t=6cm→8cm):501㎡ -기초콘크리트 타설(t=10cm):64.2㎥ -경계석 철거 및 설치 : 40m	증3,317
3	수목 식재 (양화북단)	-기존 설계상 지조립장 사용시 작업공간 확보를 위한 수목 철거후 식재 -수목식재(이팝8주, 회화3주, 쥐똥350주)	증 36,365
4	흙막이(시트파일)매립 (동호남단)	-동호대교남단 제방사면이 올림픽대로 하부로 지반이 약하고 사면으로 되어 있어 흙막이(시트파일)을 존치하여 안전을 기함. -시트파일뽑기:총584m중 인발125m, 매립459m	증45,220
5	배수홈통설치(동호남단)	-제방사면 보호 및 자전거도로 침수 방지를 위해 교대 하부 배수로 및 집수정 설치	증16,095
6	수목 식재 (동호남단)	-지조립장 부지 수목 제거후 재식재 -이팝1,모감주4,왕벚1,회화5,산수유35,앵두2,쥐똥 250,회양목350주)	증52,075
7	식생 블럭 철거 및 설치(동호남단)	-승강기 설치를 위한 가시설 및 앵커 시공을 위해 사면블럭 철거 및 복구 -노후된 사면블럭 및 보도블럭 철거 및 재설치 -사면블럭(496㎡) 및 보도블럭(172㎡)신규설치	증30,316
8	재경비 정산	재경비를 실정산 하여 감액	감126,920
계			증61,626

Ⅲ		예 산 조 치

ㅇ양화대교북단외 1개소 승강기 설치공사의 도급증액(61,626천원)은  집행잔액을 활용하여 설계변경 조치코자함.

- 예산과목: 한강 접근체계 개선(일반회계),

한강공원 승강기 신설 및 개선, 시설비(404-01)

Ⅲ		조 치 계 획

ㅇ상기와 같이 공사금액을 증액하고 설계 변경(정산)하여 공사 준공     조치.

붙임  1. 설계변경내역서(총차4회) 1부.

2. 설계변경내역(2차2회) (대용량 첨부).

3. 실정보고관련문서 (대용량 첨부).