문서번호	물재생시설과-15605
결재일자	2023. 11. 14.
공개여부	부분공개(4,7)
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
설상운		代심동길	11/14
			김윤수
협조

용역 계약금액 및 과업기간 변경

[2023년 차집관로 GIS DB 정확도 개선 용역(탄천수계-1차)]

2023. 11.

물순환안전국

(물재생시설과)

「2023년 차집관로 GIS DB 정확도 개선 용역(탄천수계-1차)」

계약금액 및 과업기간 변경 검토보고

「2023년 차집관로 GIS DB 정확도 개선용역(탄천수계-1차)」관련 계약

금액변경 및 과업기간을 연장하고자 함.

1	용역현황

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : 2023년 차집관로 GIS DB 정확도 개선 용역(탄천수계-1차)

ㅇ 시 행 사 : *******************

ㅇ 용역기간 : ***********************

ㅇ 계약금액 : *********

ㅇ 과업내용

- 차집원형관로 및 하수시설물 조사/탐사/측량******

- 차집맨홀 라이다 촬영*******을 통한 3차원 데이터 취득 후 정위치, 구조화, 타일맵제작 공공측량 성과심사 취득 및 탑재

2	설계변경 검토내용

□ 변경사항

ㅇ 물량 변경

*****************************

******************************

**********************************************

내 역	변 경 전	변 경 후	증·감
******	*******	*******	******
*****	*********	*********	**********

- 세부 내역

구 분		*******	******	*** **	*********	*** **	*** **	*** **	비고
** ****	**	*	*	*	*	*	*	***
	**	***	***	**	**	**	**	**
	**	***	***	**	**	**	**	**
** ****	**	*	*	*	*	*	*	******
	**	*	*	*	*	*	*	******
	**	*	*	*	*	*	*	******

**********************************************************************************

- 기준점 개략위치도

******************

**********************************************

ㅇ 계약기간 변경

- 절대공기 부족사항 발생

· 수방기간(5.15~10.15)과 겹쳐 우천 중 측량작업 제한

· 우천 이후 맨홀 만수로 인해 즉시 작업 불가

· 도심지역에 매립되어 있는 하수관들과 다르게 차집관거는 하천에 상당부분이 매립되어 있어 수풀들과 토사로 덮여 있어 작업에 어려움이 있음

맨홀 내 만수로 인해 촬영 불가	수풀로 인해 맨홀 위치 확인 어려움

- 겨울철 한파 등을 감안하여******************하고자 함

□ 행정사항

ㅇ ’23년 11월 : 계약변경 의뢰(물재생시설과 → 재무과)

ㅇ ’23년 11월 : 용역사인************* 변경계약 체결

ㅇ ***************

붙 임  1. 변경 설계내역서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.