문서번호	정수시설과-9832
결재일자	2023. 11. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김덕신		代조강혁	11/15
			서한호
협조

『2023년 모터펌프 및 기계설비 유지보수』

1차수 설계변경 심의위원회 개최

2023. 11.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

『2023년 모터펌프 및 기계설비 유지보수』

1차수 설계변경 심의위원회 개최계획

『2023년 뚝도아리수정수센터 모터펌프 및 기계설비 유지보수』시행 중 1차수(1,2차작업) 변경사항이 발생됨에 따라 그 내용을 심의하고자 함

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2023년 뚝도아리수정수센터 모터펌프 및 기계설비 유지보수

○ 계약금액 : *********************************

○ 계약기간 : 2023. 5. 4. ~ 2024. 3. 31.

○ 계약업체 : *************

□ 심의위원회 개최

○ 심의일시 : 2023. 11. 15.(수) 14:30 ~

○ 심의장소 : 뚝도아리수정수센터 정수시설과

○ 위원구성

- 위원장 : 정수시설과장

- 위  원 : 공업6급 조강혁 공업6급 배용우

공업7급 조혜성 공업7급 이철규

□ 심의내용

○ 설계변경의 타당성

○ 단가 산출 적정여부

○ 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부

○ 각종 제반 규정 준수여부

○ 기타 관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토

□ 설계변경내역

○ 신규공정 발생 및 시공물량 증감에 따른 설계내역 변경(붙임 참조)

○ 계약금액 변경

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
계약금액	************	************	*********
1차수 계약금액(2023)	************	************	*********
2차수 계약금액(2024)	***********	***********	*

○ 계약기간 : 변경없음

□ 행정사항

○ 심의결과에 의거 설계변경 시행 및 행정과에 변경계약 의뢰

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 사유서 및 요구서 1부.

3. 설계변경 검토 의견서 및 결정서(양식) 1부.  끝.