시  민

문서번호	급수운영과-20132
보존기간
결재일자	2023. 11. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
노병권	이연창	代이연창	11/14
			정진일
협 조
	주무관		박경원

「신월배수지 외 1개소 정밀안전진단 용역 」준공기한 연기 검토 보고

2023. 11.

강서수도사업소

(급수운영과)

「신월배수지 외 1개소 정밀안전진단 용역」

준공기한 연기 검토 보고

************************************************

우리사업소 시행중인 「신월배수지 외 1개소 정밀안전진단 용역」과 관련하여 배수지 내부 방식공사 지연에 따른 ‘준공기한 연기’ 검토 결과를 보고 드림

□ 관련 근거

○ 급수운영과-17735(2023.10.6) : 신월배수지(3지) 내부방식공사 준공기한       연기 검토보고

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 신월배수지 외 1개소 정밀안전진단 용역

○ 용역개요 : 신월배수지 40,000㎡, 신정배수지 50,000㎡

○ 용역기간 : 2023. 4. 14. ~ 2023. 12. 09.

○ 도 급 자 : (주)한국국토안전연구원 대표 오성균 외 1

○ 용역금액(도급액) : 금114,379,000원

○ 현 공정률 : 75%

□ 용역 진행 현황(2023.10.말 기준)

배수지명	진단항목	용역수행 결과	비 고
신월배수지	토목구조물 외관조사	부분 미 완료 (물빼기 작업 미 실시로 1지, 2지 조사 미 완료)
	기전설비 외관조사
	비파괴 시험결과
	상태평가 평가 결과
	안전성 평가 결과
신정배수지	토목구조물 외관조사	완료
	기전설비 외관조사
	비파괴 시험결과
	상태평가 평가 결과
	안전성 평가 결과

□ 보고 내용

***********

**********************************

******************************************

*****

******************************************************************************

□ 검토 의견

********************************************************

***********************************************************

************

****	*******
****	****************************
****	***********************************

*****************

□ 향치 계획

○ 변경계약(준공기한 연기) 의뢰(행정지원과) : 2023.11월

○ 신월배수지 1지·2지 외관조사 실시       : 2023.12월

○ 기술심의(기술심사담당관)                : 2024. 1월

○ 기술심의 보완                          : 2024. 1월

○ 최종보고회 개최 및 준공                : 2024. 3월

붙 임 : 용역 세부공정 계획 1부.  끝.