아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시미래한강본부
수신	총무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(강서한강공원 자연형 호안 복원사업 소규모환경영향평가 용역)

1. 자연성회복과-2914호(2023.11.15.)와 관련입니다.

2. 『강서한강공원 자연형 호안 복원사업 소규모 환경영향평가용역』에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명: 강서한강공원 자연형 호안 복원사업 소규모 환경영향평가 용역

나. 용역기간: 2023. 6. 27. ~ 11. 23.

다. 도 급 비: 금41,759,000원

라. 도 급 자: (주) 제일엔지니어링종합건축사무소 대표 오승교

마. 준공기한 연기

┌ 당   초: 2023. 6. 27. ~ 11. 23.

└ 변    경: 2023. 6. 27. ~ 12. 20.

******************

****************************************

*******************

붙임  1. 준공기한 연기 검토보고 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	자연성회복과장
주무관	양지정		자연성회복과장	11/15
최영준
협조자
시행	자연성회복과-2921	(	2023. 11. 15.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0858	/전송	02-3780-0745	/	jjyang@seoul.go.kr	/	부분공개(5)