문서번호	시설과-4578
결재일자	2023. 11. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	중부공원여가센터소장
임주은	代전준홍	이정환	11/16
			하재호
협 조

2024년 남산공원 산지사면 정비사업 추진계획

2023. 11.

중부공원여가센터

(시설과)

2024년 남산공원 산지사면 정비사업 추진계획

2024년 남산공원 산지방재사업 대상지 확정에 따라 2024년 우기전(6월말)에 사업 완료하여 집중호우 시 산사태 피해 등 재해를 사전에 예방하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

□「산림보호법」제45조의8(산사태취약지역의 지정 및 해제)

□「사방사업법」제5조 및 제6조(사방사업의 시행)

□ 2024년 산지방재사업 추진계획 알림[산지방재과-11503(2023.11.9.)]

Ⅱ		산사태취약지역 및 추진현황

□ 산사태 취약지역 지정 현황 : 총 14개소(※붙임1 문서 참조)

□ 최근 5년간 사업 추진 현황

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	비고
개 소	-	2	3	6	3
사업비 (천원)	*	*******	*******	*******	*******

※ 2023년 남산공원(후암배드민턴장 등 2개소) 산사태 예방공사 추진현황

ㅇ 위    치 : 후암배드민턴장 등 3개소(후암동 산1-1 외 2개소)

ㅇ 사업규모

- 구조물공 : 낙석방지책 40경간, 낙석방지망 430㎡, 깬돌골막이 설치 등

- 식 재 공 : 화살나무 2,600주, 초류종자파종 60㎡ 등

ㅇ 공사기간 : 2023. 3. 3. ~ 6. 25.

ㅇ 계약업체 : ***************

ㅇ 총사업비 : ***************************************

Ⅲ		추 진 경 위

□ 2023. 4.  5. : ‘24년 남산공원 산사태 예방사업 후보지 제출

□ 2023. 5. 15. : ‘24년 남산공원 산사태 예방사업 후보지 현장조사

□ 2023. 11. 9. : ‘24년 산지방재사업 후보지 확정 및 추진계획 알림(산지방재과)

Ⅳ		2024년 산지사면 정비사업 추진개요

□ 사업대상지 : *******************

□ 사 업 기 간 : ‘23. 11월 ~ ‘24. 6월(우기전)

□ 소요예산 : **************************************

□ 세부현황

위 치	사업종	재해위험도 평가결과		사업내용	소요예산(단위:천원)			비고
		점수	등급		개략공사비	개략설계비 (개략공사비10%)	합계
******** ***********	** ** **	**	*	************** *********	*******	******	*******	***** **************

***************************************************************

Ⅴ		향후 추진계획

□ 사면안전성 검토

ㅇ 기  간 : 2023. 11. ~ 12.(30일)

ㅇ 안전성 검토 추진사유

- 사면보호 및 보강시설이 설치되지 않은 상태이며 유실물 발생우려가 높고 하부 시설물에 피해가 발생할 것으로 예상되어 사면 현황 파악 및 추가적 안정화 방안을 모색하여 적용할 필요가 있음.

ㅇ 시행방법 : **** ****************

ㅇ 수의계약사유

**************************************************************************************************

□ 산지사면 정비사업 실시설계

ㅇ 기  간 : 2023. 11. ~ 12.(30일)

ㅇ 실시설계 추진방향

-  사면안전성 검토용역 내용 반영

-  사방사업 설계기준 반영

⦁ 서울형 사방시설 설계 및 시공 기준

⦁ 사방사업 실시설계 사전심의 검토기준 등

-  주변환경과 어울리는 사방시설 설치

⦁ 사방시설 규모는 안전성을 우선 고려하되 가능한 자연 훼손 최소화

⦁ 설계시 환경 관련 전문가의 자문 시행 등

ㅇ 시행방법 : ****

ㅇ 수의계약사유

*******************************************************************************************************

□ 산사태취약지역 지정 절차 이행

ㅇ 시  기 : 2024. 1. ~ 2.(2개월)

ㅇ 지정자 : 서울특별시장

-  심의자료 작성·요청 : 중부공원여가센터

-  심의 및 지정 공고 : 산지방재과

□ 공사시행

ㅇ 추진일정

-  2024. 1.     : 계약심사 및 일상감사, 예산 재배정 요청

-  2024. 2.     : 공사 발주 및 계약

-  2024. 3. ~ 6. : 공사 시행 및 준공

붙임 1. 산사태취약지역 위치도 및 지정현황 1부

2. 사업대상지 위치도 및 현황사진 1부.  끝.