아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰[유량계(신설) 설치공사(신대방동 698-26번지 외 2)]

우리 사업소에서 시행 중인 「유량계(신설) 설치공사(*******************)」와 관련하여 아래와 같이 준공기한 연장을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 유량계(신설) 설치공사(********************

2. 변경내용

계약자	계약금액		계 약 기 간		비 고
	당 초	변 경	당 초	변 경
*******	*********	****	********************	********************	*****

3. 계약금액 : 변경없음

4. 지체상금 부과 : 미부과

5. 변경사유 : 선행공정인 유량계실 설치공사 공정지연으로 후속공정인 전기 및 통신공사 잔여공정 마감 및 시운전 기간 반영

6. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 상수도 블록시스템 공급 체계 구축, 시설비 및 부대비(시설비)

붙임  1. 준공기한 연기 보고 1부.

2. 준공기한 연기원 및 합의각서 각 1부.  끝.

	시 설 관 리 과 장
주무관	최대진		기전팀장	代최대진		시설관리과장	11/16
代오영진
협조자
시행	시설관리과-20555	(	2023. 11. 16.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 2층 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4623	/전송	02-3146-4639	/	djdj3763@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)