문서번호	시설관리과-20526
결재일자	2023. 11. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
최대진		代최대진	11/16
			代오영진
협 조
	주무관			공보라

유량계 설치공사 준공기한 연장 검토 보고

2023. 11.

남부수도사업소

(시설관리과)

- 신대방동 698-26번지 외 2개소 유량계 설치공사 준공기한 연장 검토 보고

우리 사업소에서 시행중인 「유량계(신설) 설치공사」관련 계약상대자가 제출한 준공기한 연기 요청에 대해 검토 보고 드림

1		관련근거

ㅇ「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제13장(제8절 2.계약기간의 연장)

ㅇ『유량계 설치공사』준공기한 연기원 제출[NJ-2023-1215-001('23. 11. 16)]

2		공사개요

ㅇ 공 사 명 : 유량계(신설) 설치공사(신대방동 698-26번지 외2)

ㅇ 공사기간 : 2023. 10. 23. ~ 2023. 11. 20(29일간)

ㅇ 공사위치 : 동작구 신대방동 698-26번지 외 2개소

ㅇ 계약금액 : 금47,160천원(금사천칠백일십육만원)

ㅇ 공사내용 : 유량계 신설 3개소

ㅇ 계약업체 : 주식회사 남전엔지니어링

3		검토내용

ㅇ 준공기한 변경 사유

- 선행공정인 유량계실 설치공사 공정지연으로 후속공정인 유량계 설치, 전기인입 및 유량감시시스템 구축 및 시운전 기간 반영

ㅇ 준공기한 연장 요청사항

구 분	계약금액		계 약 기 간		비 고
	당 초	변 경	당 초	변 경
통신·전기	금47,160천원	변경없음	`23. 10. 23.~ `23. 11. 20.	`23. 10.23.~ `23. 11. 30.	증)10일

ㅇ 지체상금 : 미부과(계약상대자 귀책없음)

ㅇ 담당자 검토의견

-「유량계(신설) 설치공사」준공기한 연장에 대해 검토한 결과 해당 통신 및 전기공사의 잔여공정 마감 및 시운전 기간 반영이 필요하여 준공기한 변경이 적정하다고 판단됨.

4		조치계획

ㅇ 계약부서(행정지원과)로 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임 : 공사기간 연기원 1부.  끝.