현장중심! 민생중심! 더불어 행복한 성북
		성 북 구
수신자		내부결재
(경유)
제목	2023년 자원회수시설 등 반입불가폐기물 위탁처리용역 설계변경 의뢰

청소행정과-39460호(2023.11.10)와 관련하여 2023년 자원회수시설 등 반입불가폐기물

위탁처리용역의 처리물량 증가에 따른 설계변경을 아래와 같이 의뢰합니다.

1. 용 역 명 : 2023년 자원회수시설 등 반입불가폐기물 위탁처리용역

2. 처리업체 : 애니테크(주), 경기도 양주시 남면 운하로66-14

3. 용역기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.

4. 계약금액 : 금1,539,648,000원(금일십오억삼천구백육십사만팔천원)

5. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감		비 고
			증	감
총용역비	1,539,648,000	1,916,006,400	376,358,400	-
도 급 비	1,539,648,000	1,916,006,400	376,358,400	-

6. 설계변경 요청사유 : 최종 처리예상물량 증가 (9,000톤→11,200톤)

7.  예산과목 : 청소행정과,친환경적청소시스템구축,깨끗한도시환경조성,

생활폐기물처리의효율화, 민간이전, 민간위탁금

붙 임 : 1. 방침서 1부.
2. 설계변경 사유서 1부.

3. 계약변경 설계서 및 내역서 1부.  끝.

주무관	권오혁		청소행정담당	우경죽		청소행정과장	박홍진		안전생활국장	11/16
맹홍재
협조자	계약담당	조은숙		재무과장	김성동
시행	청소행정과-40340	(	2023. 11. 16.	)	접수		(		)
우	02848	서울특별시 성북구 보문로 168	/	http://www.sb.go.kr
전화	02-2241-4405	/전송	02-2241-6591	/	200911231@sb.go.kr	/	부분공개(5)