문서번호	급수운영과-18623
결재일자	2023. 11. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
김윤선	김윤환	11/16
		이용구

설계변경 검토 보고

(낙성대가03-03 소블록 배수관 세척 용역)

2023. 11. 16.(목)

남부수도사업소

(급수운영과)

설계변경 검토 보고

급수운영과장 : 이용구☎3146-4540 급수운영팀장 : 김윤환☎4554 담당 : 김윤선☎4559

「낙성대가03-03 소블록 배수관 세척 용역」의 현장여건에 따라 신규공종 및 계약물량 증·감이 발생되어 설계변경을 시행하여 공사업무에 만전을 기하고자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 낙성대가03-03 소블록 배수관 세척 용역

○ 용역기간 : 2023. 4. 18. ~ 2023. 11. 30.

○ 용역개요 : 배수관 D80~300mm, L=6,234m / 맥동류세척

○ 시공업체 : **************

○ 계약금액 : ****************************

□ 설계변경 근거 및 사유

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 및 동법 시행령 제74조

- 설계 변경으로 인한 계약금액의 조정

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준, 행정안전부예규 제252호 (2023.7.1.)

구분		금 액		증·감
		당 초	변 경
용역비	계	***********	***********	*	**********
	공급가액	***********	***********	*	**********
	부가가치세	**********	**********	*	*********

- 제9장 공사계약 일반조건 제6절 공사 설계의 변경 및 제7절 계약금액의 조정

□ 설계변경 금액 : ********************

세척 구경[mm]	당초 연장 [m]	변경 연장 [m]	증·감 [m]
80	***	*****	*	***
100	***	*****	*	***
150	*****	*****	*	**
200	*****	*****	*	**
250	**	**	*	*
300	***	***	*	***
총 연장	*****	*****	*	***

□ 설계변경 개요

○ 세척 계획 및 구간별 단수범위에 따른 연장 변동

○ 세척 시행중 현장여건 변동에 따른 신규공종 발생 및 물량변동(증·감)

- 물량증가

·*******************************

·********************************

- 물량감소

·********************************************

·********************************************

·*******************************************

- 신규공종 : **************

주요 변동 공종	당 초 [원]	변 경 [원]	증·감 [원]
*******	*********	*********	*	*********
******	**********	**********	*	*********
***	**********	**********	*	*******
****	**********	**********	*	**********

□ 조치계획

○ 상기와 같은 주요 설계변경 사유에 대하여 사업소 자체 심의위원회를 개최 후 심의 결과에 따라 설계변경을 시행하고자 함

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.
2. 기타 자료 1부.
3. 감리 검토 실정보고 1부.  끝.