실정보고(수방기간 자재운반 및 부지임대료 반영) 검토보고

공 사 명

청계천~정릉천 자전거도로 연결공사

공사개요

· 위    치 :  청계천~정릉천 합류부

· 사업기간 : '22.01.~'23.12.

· 총사업비 : 36억 원

· 시공사 : (주)태궁종합건설

· 감리단 : 수성엔지니어링 외1개

실정보고 건명

수방기간 하천내 적치 자재 운반 및 부지임대료 반영

실정보고 사유

치수안전과에서 우기중 청계천 내 적치된 장비, 자재 등에 대하여 하천밖으로 반출 요구하였으며, 이에 대한 운반비 및 부지임대료를 반영코자 함.

건설사업관리단

검토의견

수방기간 시민 안전을 위해 자재·근로자 휴게시설 등을 하천밖으로 반출해야 하며, 이에 대한 부지임대료 및 자재운반비용 반영은 적정한 것으로 판단됨.

관련근거

치수안전과-8171(2023.4.24.) : 우기중 청계천 내 공사중지 및 안전조치 이행관련 협조요청

변경(안)

구분	당 초	변 경	비 고
규모	-	부지임대료 정산 증)3,179천원 ·여주시 도곡리76-1[면적:1,256m2] ·기간 : 23.5.~23.11.[6개월] 자재운반비 증)1,882천원 ·4.5ton[왕복12회], 1.0ton[왕복2회]
대상	-	직접공사비 5,131천원 제경비 1,021천원 부가가치세 615천원 도급비 6,767천원
금액	-	6,767천원

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ㅇ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

발주처

검토의견

수방기간(5.15~10.15.) 하천내 안전사고를 예방코자 공사자재 및 근로자휴게소 등을 반출하고 해당 부지임대료를 반영코자 하는 책임건설사업관리기술인의 실정보고는 적정한 것으로 판단됨.

비 고

결재

주무관

노승환

토목설계과장

박운용

토목부장

11/17

이임섭

협조

주무관

이나영